하나되는 중구, 함께하는 중구
	서울특별시 중구
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제2회) 시행(2023년 관내 하수도 준설공사(연간단가)]

우리 구에서 시행중인『2023년 관내 하수도 준설공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(제2회)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2023년 관내 하수도 준설공사(연간단가)

2. 계약기간 : 2023. 3. 14. ~ 12. 31.(착공일 : 2023. 3. 17.)

3. 도급업체 : 주영종합건설(주) 대표 임병배

4. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	공 사 금 액			비고
	당 초	변 경	증 · 감
총 공 사 비	1,765,443,620	2,091,500,000	(증) 326,056,380
도 급 비	1,621,943,620	1,948,000,000	(증) 326,056,380
이전비 및 기타	143,500,000	143,500,000

5. 설계변경 사유

○ 낙찰차액 사용계획 보고【치수과-22705호(2023.10.13.)】

- 집중호우 대비 집중강우 중점관리 구역 추가 준설 시행

○ 긴급준설비 집행계획 보고【치수과-23974호(2023.11.8.)】

- 우기철 집중호우로 인한 준설토 재퇴적에 따른 추가 준설 시행

○ 준설물량 변경(증·감)에 따른 설계변경

6. 예산과목

○ 치수과, 하수시설관리, 풍수해 예방관리 및 준설, 하수도 준설공사, 시설비 및 부대비, 시설비[구비][금1,400,500천원]

○ 물순환안전국 물재생계획과, 하수시설관리(사업), 하수관로 신설개량(사업), 하수관로 유지관리비, 수선유지교체비, 수선유지비[시비, 공기업특별회계][금305,000천원]

○ 치수과, 하수시설관리, 풍수해 예방관리 및 준설, 하수도 준설공사, 시설비 및 부대비, 시설비[시비, 특별조정교부금][금250,000천원]

○ 물순환안전국 물재생계획과, 하수시설관리(사업), 하수도관리(사업), 하수도 악취 저감 추진, 수선유지교체비, 수선유지비[시비, 공기업특별회계][금136,000천원]

붙 임  1. 설계변경사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부.

4. 설계변경 검토보고 1부.

5. 낙찰차액 및 긴급준설비 집행계획 각 1부.

6. 일상감사 결과 1부.  끝.

주무관	김병훈		치수팀장	안봉섭		치수과장	김규엽		안전건설교통국장	12/07
정욱성
협조자	주무관	김민정		계약팀장	왕지영		재무과장	조덕진
기획재정국장	송인상
시행	치수과-25464	(	2023. 12. 7.	)	접수		(		)
우	04558	서울특별시 중구 창경궁로 17 (예관동)	/	http://www.junggu.go.kr
전화	3396-6142	/전송	02-3396-8853	/	ronaldok9@junggu.seoul.kr	/	부분공개(5)