문서번호	도로보수과-13806
결재일자	2023. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
전휘기		유은중	12/07
			代박진기
협조
	주무관		맹우재

『'23/'24 제설작업 용역(장기계속)』 설계변경 검토보고(제1회, 정산)

2023. 12.

서부도로사업소

도로보수과

『'23/'24 제설작업 용역(장기계속)』

설계변경 검토보고(제1회, 정산)

우리 사업소에서 시행하는 '23/'24 제설작업 용역(장기계속)'과 관련하여   1차분 설계변경(정산) 및 사고이월 검토사항이 있어 아래와 같이 보고드림

□ 추진근거

○ '23/'24 제설작업 용역 실정보고(재난기금재배정)[도로보수과-13792호(2023.12.07.)]

○ '23 회계연도 재난관리기금 사고이월 대상사업 제출 안내[안전총괄과-9623호(2023.12.05.)]

□ 용역개요

○ 공 사 명 : 2023/2024년 제설작업 용역-서부

○ 계약기간 : 2023.11.01. ~ 2024.03.31.

- 1차분 : '23.11.15. ~ '23.12.31.(47일) / 2차분 : '24.01.01 ~ '24.03.15.(74일)

○ 용 역 사 : ***********

○ 용 역 비 : **************

- *******************************************

□ 보고내용

○ 설계변경 내역

(단위 : 천원)

공 사 명	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총 용 역 비	***********	***********	*************
총 차 분	***********	***********	*************
1 차 분	***********	***********	*************
2 차 분	***********	***********	*************

○ 주요공종 및 수량 변경 내역

공종	규격	단위	변경내역				비고
			당초	변경	증ㆍ감
상황반장	주간	hr	***	***	*	***
	야간	hr	***	***	*	***
상황대기원	야간	일	***	***		*
제설작업원	주간	hr	*****	*****	*	***
	야간	hr	***	*****	*	***
제설작업운전원	주간	hr	*****	*****	*	***
	야간	hr	***	*****	*	***
제설장비 상시대기	굴삭기 (0.6[eqn: m ^{3}])	hr	***	***	*	**
제설작업	굴삭기 (0.6[eqn: m ^{3}])	hr	***	***	*	***
덤프트럭(월임대)유류비		hr	***	*****	*	***
덤프트럭 월 임대(10대)	15톤 덤프	월	***	***		*
덤프트럭 월 임대(7대)	15톤 덤프	월	*	***	*	***
덤프트럭 월 임대(1대)	5톤 덤프	월	*	***	*	***

○ 설계변경 사유

- 제설작업 실 근무와 덤프트럭 월임대에 따른 1차분 작업 물량 반영(제설작업 실근무는 '23.12.07.(목)까지 반영하고 덤프트럭 월임대는 '23.12.31.(일)까지 반영)

- '23/'24 제설작업 용역 실정보고(재난기금재배정)[도로보수과-13792호(2023.12.07.)]에 따른 덤프트럭 추가 배치 물량 반영(용역 착수일부터 반영)

□ 조치계획

○ 상기 보고와 같이 설계변경 후 정산처리하고, 재난관리기금 잔액***********은 사고이월 조치하고자 하며,

○ '23.12.08.(금)부터 발생하는 용역비(제설작업 실 근무)는 2차분에 포함하여 정산코자 함

붙임 : 1. '23/'24 제설작업 용역 실정보고 1부.

2. 재난관리기금 사고이월 제출 안내 공문 1부.

3. 설계변경 내역서 2부(총차분, 1차분).  끝.