문서번호	시설관리과-22602
결재일자	2023. 12. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
시설관리팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
김재영	문병희	12/08
		박기용

방배배수지(3지) 내부방식공사

회계연도 세출예산 이월 시행

2023. 12.

강남수도사업소

(시설관리과)

방배배수지(3지) 내부방식공사

2023년 회계연도 세출예산 이월 시행

2023년 시행중인 방배배수지(3지) 내부 방식공사와 관련하여

회계연도 세출예산 이월 시행하고자 조치계획을 보고드림

Ⅰ		현 황

○ 공 사 명 : 방배배수지(3지) 내부방식공사

○ 공사개요 : 도막식 7,200㎡, 패널식 2,688㎡, 기타부대공 1식

○ 공사기간 : 2023.7.25.～2024.6.16.

○ 계약금액 : 1,572,533,400원

○ 계 약 자 : (주)서림에이엔씨 대표 최춘서

○ 공 정 율 : 35%(도막제거중)

Ⅱ		그간의 추진사항

○ 2023. 3. 29 : 공법선정위원회 개최(사업소)

○ 2023. 5. 11 : 전문공사 발주사업 사전검토(본청 건설혁신과)

○ 2023. 5. 22 : 공사계약 심사요청(본부 안전조사과)

○ 2023. 6. 12 : 공사계약 의뢰

○ 2023. 7. 25 : 공사계약 체결

○ 2023. 8.  3 : 공사 착공

※ 배수지(2지) 항청소(8.30), 1지 하자점검(9.6) 배수지 안정화 작업 및         임시전력 가설(10.15), 유입관 물막이 공사 등 일정 지연됨

○ 2023. 10.15 ~  : 이동비계설치 및 그라인딩 작업

Ⅲ		사고이월 사유 및 요구 세부 내역

□ 사고이월 사유

○ 상기공사는 준공기한 미도래(2023.8.3~2024.6.16) 사고이월         하고자 함

□ 예산 세부 내역

○ 이월내역

- 예산과목 : 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비(배수지 내부 방식공사)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) ※`21사고이월액 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,275,893,000	1,275,893,000	1,275,893,000	474,112,830	801,780,170 ( )	-
공 사 비		1,275,893,000	1,275,893,000	1,275,893,000	474,112,830	801,780,170 ( )	-
	도 급 비	1,275,893,000	1,275,893,000	1,275,893,000	474,112,830	801,780,170 ( )	-
	관 급 비	-	-	-	-	( )
보 상 비		-	-	-	-	( )
이전비․기타					-	( )

※ 선급금(327,800,000원) 지출, 기성금(196,900,000),

기성금적용[102,246,830원=196,900,000-44,066,000(노무비)-50,587,170(선금정산액)]‘23년 내 지출이

가능하여 지출액에 포함

Ⅳ		조치의견

○ 상기 사항과 같이 연내에는 공사완료가 불가능하므로 사고이월        하여 공사시행에 만전을 기하고자 함

붙임  1. 예산이월 요구서 1부.

2. 사고이월 사업별 명세서(지출원인행위 미필 이월명세서) 각 1부.

3. 계약내역서(최종) 1부.  끝.