문서번호	미래첨단교통과-17627
결재일자	2023. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		대중교통정보팀장	미래첨단교통과장
전성완		가순종	전결 12/08
			代최영순
협 조

2023년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 전기공사

설 계 변 경 ( 정 산 )   보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

도 시 교 통 실

(미래첨단교통과)

2023년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 전기공사

설 계 변 경 ( 정 산 )   보 고

미래첨단교통과장 : 이수진☎2133-4950 대중교통정보팀장 :가순종☎4968 담당 : 전성완☎4970

우리과에서 시행중인 「2023년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 전기공사」에 대하여 감리사로부터 설계변경 요청서가 접수되어 이에 대한 검토보고임

Ⅰ		관련근거

ㅇ 전기공사 설계변경내역서에 대한 기술검토보고서 제출의 건

(진전기 기검 제23-10호, 2023.12.06.)

Ⅱ		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 전기공사

ㅇ 공사위치 : 종로구 승가사입구(01-148) 버스정류소 등 36개소

ㅇ 공사기간 : 2023. 7. 20. ~ 12. 31.

ㅇ 공사내용

- 지중케이블 및 배관, 가공케이블 및 접지선 포설

- 굴착 및 조가선, 강관주 설치 등

ㅇ 도급금액 : 101,496천원

ㅇ 도 급 자 : ***************

ㅇ 감 리 사 : ******************

Ⅲ		추진경위

ㅇ '23. 3. 24 : 추진계획 수립

ㅇ '23. 6. 14 : 공사발주

ㅇ '23. 7. 20 : 공사계약

ㅇ '23.11. 15 : 공사 실정보고 승인 통보

※ 현 공정률 95%

Ⅳ		설계변경 내용

ㅇ 설계변경 사유

- 실정보고(미래첨단교통과-16167, 2023.11.15.) 관련 작업물량(내역) 변경

- 물량 및 보험료 정산

ㅇ 주요 변경내역

공종(품명)	규 격	단위	수 량			금액증감 [천원]
			당초	변경	증감
********	***********	*	***	***	****	***********
************	************	*	***	***	******	*************
******	***********	*	***	***	*****	***********
********	*********	*	***	***	****	**********
***********	***********	*	*	*	****	*************
***********	***********	*	*	*	***	*****
************	***********	*	**	***	****	*****
********	*****	*	**	**	***	***

ㅇ 보험료 등 정산

(단위 : 원)

구 분	(조정)계상금액	실납부(사용)금액	정산반영금액
*****	*********	*	*
*****	*********	*	*
*********	*******	*********	*******
*******	*********	*	*
*********	*******	*	*

ㅇ 공사비 변경 내용

(단위 : 원)

구 분	공 사 비			비 고
	당 초	변 경	증 감
****	**********	**********	******************
*****	*********	*********	*****************
*******	***********	**********	******************

- 예산과목 : 미래첨단교통과, 과학적인 교통정보서비스 구현, 과학적                 교통운영체계 구축(교통관리계정), 버스정보안내단말기                 (BIT) 설치, 시설비및부대비, 시설비

ㅇ 감리사 검토 의견

- 설계변경내역서 검토 결과 당초 계약내역과 실시공 차이로 감액

요인이 발생한 바 변경내용이 적정하다고 사료됨

Ⅴ		보고자 의견

ㅇ 감리사의 설계변경(정산) 요청사항을 검토한 결과 설계변경 계약요청      내용이 적정한 것으로 판단되어 재무과에 변경계약 의뢰 및 준공      처리코자 함

Ⅵ		행정사항

ㅇ 설계변경(정산)에 따른 변경계약 의뢰              ………(재무과)

붙임  설계변경 보고서 1부.  끝.