아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		강서도로사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	(경인양행 앞 보행환경개선)교통안전시설(신호) 원인자부담공사 추가 승인요청 및 공기연장 승인통보

강서구청 교통행정과-106890호(2023.12.01.)와 관련하여 추가승인 및 공사기간 연장요청을 아래와 같이 승인하오니 기간내 사업을 완료할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 경인양행 앞 신호기 및 제어기 이설공사

2. 원 인 자 : 강서구청 교통행정과

3. 공사장소 : 강서구 염창동 118 경인양행 앞 등 3개소

- 추가 공사대상 : 등서초교 입구 및 후문 제어기 2대 교체

4. 공사내용 : 제어기 교체 및 이설

5. 연장사유 : 사업대상지 추가로 인한 공기연장

6. 공사기간 연장내용

구 분	승인 전	승인 후	비고
****	************* ***********	************* ***********	*****

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장), 강서구청장(교통행정과장), 서울강서경찰서장(교통과장)
주무관	박준규		기전과장	12/08
김병용
협조자
시행	기전과-13488	(	2023. 12. 8.	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	jkp1209@seoul.go.kr	/	부분공개(5)