문서번호	기전과-13468
결재일자	2023. 12. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
박준규	12/08
	김병용

(경인양행 앞 보행환경개선)

교통안전시설물(신호)원인자공사

실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  12.

강서도로사업소

(기전과)

경인양행 앞 보행환경 개선사업

교통안전시설물 원인자공사 승인 검토보고

사업소장 : 이경우☎2657-7910 기전과장 : 김병용☎7908 담당 : 박준규☎7963

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사의 승인요청을 검토하고 결과를 보고드림

Ⅰ		관련근거

□ 경인양행 앞 신호기 및 제어기 이설 관련 원인자 공사 승인 변경 요청

ㅇ 강서구청 교통행정과-106890(2023.12.01.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 경인양행 앞 신호기 및 제어기 이설공사

□ 원 인 자 : 강서구청 교통행정과

□ 공사위치 : 강서구 염창동 118 경인양행 앞

□ 공사내용 : 제어기 이설

□ 공사업체

구분	설 계	감 리	시 공	비 고
**	********	********	**********

Ⅲ		실정보고 사항

□ 도급비 : 15,580천원 → 30,580천원(증15,000천원)

ㅇ 등서초교 후문 및 입구 2개소 : 직접비 증 8,383천원

- 노후 제어기 교체

ㅇ 간접비(간접노무비 및 보험료 등) : 직접비 증 5,253천원

ㅇ 부가가치세 : 증 1,364천원

□ 공사기간 연장

ㅇ 당초) 2023.10.26. ~ 2023.11.10.

ㅇ 변경) 2023.10.26. ~ 2023.12.15.  (증 35일)

ㅇ 공사기간 연장 사유 : 원인자공사 대상지 추가로 인한 공기연장

□ 상세내용 및 내역 붙임 실정보고 참조

Ⅳ		검토내용

연번	구분	검 토 사 항	검토결과
1	일 반	규제 심의내용과 설계도서 내용 대조	적 정
2	일 반	설계, 시공, 감리업체 확인	적 정
3	설계사	(신호)전기설비의 설계업 등록업체 교통전문분야(교통기술사 보유)로 신고한 자	적 정
4	시공사	(신호)전기공사업	적 정

Ⅴ		조치의견

□ 제반서류가 적정하여 조건부승인하고자 함

Ⅵ		행정사항

□ 원인자 및 유관기관 승인 통보

붙임  공사 실정보고 제출보고서 1부.  끝.