문서번호	도로보수과-13173
결재일자	2023. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	강서도로사업소장
서효원	안동국	12/08
		이경우

『2023년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)』

설계변경(2차) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  12.

강서도로사업소

(도로보수과)

『2023년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)』

설계변경(2차) 검토 보고

우리 사업소에서 시행 중인『2023년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)』에 대한 설계변경 검토서가 감리단으로부터 접수되어 검토결과를 아래와 같이 보고드림.

▢ 관련근거

○ 노면표시(연간단가)설계변경(2회) 제출의 건 (문창 2023-강서-039호, 2023.12.06.)

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2023년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)

○ 공사규모 : 노면도색 143,121m, 도색제거 2m, 밑그림 93,604m

○ 공사기간 : '23.04.06. ~ '23.12.15.

○ 공 사 비 : 839,165,800원

○ 도 급 자 : 진원피앤씨㈜ 대표 엄재열,엄성수

▢ 설계변경사항

○ 설계변경 사유 : 개화동로 개선사업, 자전거도로정비, 사후포장도로 정비

○ 공사기간 변경 : 없음

○ 물량 및 공사비 변경내역

- 공사물량 변경

구 분		단 위	작 업 량				비고
			당 초	변 경	증·감
****	**	*	******	******	**	******
	**	*	******	*******	**	******
****		*	*****	******	**	*****
*****		*	******	******	**	******
*****	**	*	**	*	**	**
	**	*	*	*	**	*
*****		*	***	***	**	**
*****		*	***	***	**	**

- 공사비 변경                                                     (단위 : 원)

구 분		당초금액	변경금액	증·감		비고
총 공 사 비		*************	*************	**	***********
도급비	공급가액	***********	***********	**	***********
	부가가치세	**********	**********	**	**********
	계	***********	*************	**	***********
관 급 자 재		***********	***********	**	**********
이 전 비		***********	***********		*

▢ 조치계획

○ 상기 내용과 같이 검토 보고한 설계변경 사항을 반영하여 변경계약 후 공사시행에 만전을 기하고자 함.

붙임  설계변경 검토보고서(감리단) 1부.  끝.