아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	[감재배정요구승인요청] 개봉고가 성능개선공사 통계목 변경을 위한 감재배정

「개봉고가 성능개선공사」와 관련하여 건설사업관리용역비 추가 확보를 위한 통계목 변경을 하고자 감재배정요구승인요청을 합니다.

가. 관련근거

- 개봉고가 성능개선공사 예산 통계목 변경 검토 보고(교량안전과-9799,'23.12.7)

나. 예산변경 요청 내역

(단위 : 천원)

예 산 과 목					예 산 현 액	변경액		변경후 예산액
정 책	단 위	세부	편성목	통계목		증	감
교량관리	일반교량관리 (도시개발특별회계)	중차량노선시설물 성능개선	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	10,335,000	-	209,900	10,125,100
				감리비 (401-02)	1,004,000	209,900	-	1,213,900

다. 변경사유 : 공사기간 연장에 따른 건설사업관리용역기간 연장으로 감리비 증액

붙임 : 감재배정요구승인요청서 1부.  끝.

주무관	이재우		교량기획팀장	민형일		교량안전과장	12/08
조현석
협조자
시행	교량안전과-9989	(	2023. 12. 8.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 서울특별시청 11층 교량안전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-1970	/전송	02-2133-1429	/	ohlove4u@seoul.go.kr	/	부분공개(5)