문서번호	치수과-19700
결재일자	2023. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	부구청장 제633호

주무관		치수팀장		치수과장		안전건설교통국장		부구청장
한재원		오상호		민병기		신용철		12/08
								유보화
협조
	기획재정국장		어용경
	재무과장		나재진
	계약팀장		황미란

「2023년 지하주택 등 침수방지시설 설치공사(단가계약)」 설계변경(최종) 추진 계획

「2023년 지하주택 등 침수방지시설 설치공사(단가계약)」

설계변경(최종) 추진계획

2023. 12.

[안전건설교통국 치수과]

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [√] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [√] ( 서울시 재난관리기금 ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
구민의견 수렴		●	방법	:	설문조사 [ ] 만족도 조사 [ ] 찬반투표 [ ] 기타 [ ]
		●	시기	:	시행 전 [ ] 시행 중 [ ] 시행 후 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목:
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「2023년 지하주택 등 침수방지시설 설치공사(연간단가)」

설계변경(최종) 추진계획

침수방지시설 설치 예산재배정에 따라 주민불편사항 및 재해예방에 만전을 기하고자 설계변경 추진하여 신규 및 기설치세대 설치요청 민원에 적극 대응코자 함.

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2023년 지하주택 등 침수방지시설 설치공사(연간단가)

○ 기    간 : 2023.03.08. ~ 2023.12.30.

○ 공사개요 : 역류방지기 설치 1,073개, 차수판 설치 2,170m 등

○ 계 약 자 : ㈜자이언 대표 최종식

○ 총사업비 : 금1,400백만원(구기금 700, 시기금 700) … 매칭사업(50 : 50)

□ 추진경과 (공정률 : 95%)

○ '23. 2.13.         사업발주

- 사업비 600백만원(구기금 300, 시기금 300)

○ '23. 2.15.         성동형 주거환경개선사업 추진(주택정책과)

○ '23. 2.16. ~ 3.25.   시설물 설치 신청서 접수(주택정책과, 주민센터)

○ '23. 3.13. ~ 7.18.   공사착공 및 접수세대 설치추진

○ '23. 6. 8.          1차 설계변경 시행(수요증가에 따른 추가예산 반영)

- 사업비 1,300백만원(구기금 700, 시기금 600)

○ '23. 7.19.         구청장 지시사항 제53호(침수방지시설 확대추진)

- 망실, 파손 등으로 인한 재설치 요청 시 설치지원

○ '23. 9.20.          2차 설계변경 시행(수요증가에 따른 추가예산 반영)

- 사업비 1,400백만원(구기금 700, 시기금 700)

○ '23.11.14.          區 재난관리기금 재배정(100백만원)

○ '23.11.28.          市 재난관리기금 재배정(100백만원)

□ 보고내용

○ 추가예산 반영 … 200백만원(구기금 100, 시기금 100)

- 피해발생 우려 우선순위(1~4단계) 미설치 세대 설치지원 및 기설치 세대 재설치요청 민원대응 등

○ 공사비 증·감내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총공사비	1,400,000,000	1,600,000,000	증) 200,000,000
공급가액	1,270,117,636	1,451,935,818	증) 181,818,182
부가가치세	127,011,764	145,193,582	증) 18,181,818
도 급 비	1,397,129,400	1,597,129,400	증) 200,000,000
이 전 비	2,870,600	2,870,600	-

○ 주요 변경내용

- 주요 물량 증·감

공 종		단위	수 량
			당 초	변 경	증 · 감
배수공	역류방지기 설치	개소	1,073	1,404	증) 331
	자동펌프 설치	대	4	1	감) 3
시설물공	차수판 제작	m	2,170	2,623	증) 453
	차수판 지주 설치	개소	2,600	4,066	증) 200

- 품질시험비 제외(한국산업표준 인증제품)

※ 건설기술진흥법 시행령 제91조(품질시험 및 검사) 제2항 제2호)

□ 조치계획

○ 피해발생 우려 우선순위(1~4단계) 미설치 세대 설치지원 및 기설치 세대 재설치요청 민원대응을 위해 상기와 같이 물량 증·감 등으로 설계변경을 시행코자 하며, 향후 실물량으로 정산 처리코자 함.

붙임  1. 설계변경내역서(3차) 및 제비율 검증확인서 각 1부.

2. '23년도 재난관리기금 추가 확보계획 1부.

3. 재난관리기금(시·구) 예산 배정 공문 및 심의결과 각 1부.

4. 일상감사 의견서 1부.  끝.