문서번호	한강문화관광과-3792
결재일자	2023. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	한강문화관광과장	한강사업총괄부장	한강사업추진단장		미래한강본부장
김세정	안신훈	윤석환	김용학		12/08
					주용태
협 조
	총무과장			박서영
	기획예산과장			代구혜선

한강 역사문화홍보 전시관 설계 및 제작물 제작‧설치 용역 /

뚝섬 자벌레 서울형 키즈카페 설계 및 기구 제작‧설치 물품

계약변경(기간연장) 검토보고

2023. 12월

미래한강본부

(한강문화관광과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

한강 역사문화홍보 전시관 설계 및 제작물 제작‧설치 용역 /

뚝섬 자벌레 서울형 키즈카페 설계 및 기구 제작‧설치 물품

계약변경(기간연장) 검토보고

한강사업총괄부장 :윤석환☎3780-0865 한강문화관광과장 :안신훈☎0765 담당 : 김세정☎0796

뚝섬 자벌레에 조성 중인 한강 역사문화홍보 전시관 및 서울형 키즈카페설계·설치 계약의 안전한 사업 수행을 위하여 준공기한을 연기하고자 검토하고 보고드림

□ 사업개요

계약건명	① 한강 역사문화홍보전시관 설계 및 제작물 제작·설치 용역	② 뚝섬 자벌레 서울형 키즈카페 설계 및 기구 제작·설치 물품
계약기간	********************************	*************************
계약금액	***********	*********
계약업체	*******************	*******************
주요내용	********************* ******************* ************	********************* *********************

□ 추진현황

< ① 한강 역사문화홍보 전시관 >

ㅇ ’22. 5.25. ~	용역 계약 체결 및 착수

ㅇ ’22.12.	기본계획 및 1차 기본설계 완수

ㅇ ’23. 1. ~ 7.	실시설계 완수

ㅇ ’23. 8. ~	현장착수 및 제작물 제작·설치

ㅇ ’23.10.	3층 연계공간 조성, 외부사인물 설치 과업추가 및 변경계약

< ② 서울형 키즈카페 >

ㅇ ’23. 2. ~ 4.	사전 절차 및 입찰 공고 시행

*************************************

ㅇ ’23. 6. ~	한강유역환경청 건축물 용도 변경 협의 등

ㅇ ’23. 7. ~ 10.	변경시행계획 수립 및 입찰 공고, 협상

ㅇ ’23.11. 2.~	착수 및 공사 발주 (건축, 전기, 소방, 통신)

□ 계약변경(기간연장) 검토

**********

**********************************************************************************************

***********************************************************************

*******************************************************************************

********************************************************

ㅇ 변경내용

계약건명		① 한강 역사문화홍보전시관 설계 및 제작물 제작·설치 용역	② 뚝섬 자벌레 서울형 키즈카페 설계 및 기구 제작·설치 물품
****	**	***************************	*************************
	**	***************************	*************************
****		***********	*********
****		********************* ******************* ************	********************* *********************
비고		계약금액, 과업내용 변경사항 없음

□ 검토의견

************************************************************************************

******************************************************************************************

******************************************************************************************

□ 협조사항 및 향후일정

ㅇ 협조사항 : 총무과 - 변경 계약 체결

ㅇ 향후일정(안)

- ’23.12월	계약변경 의뢰 및 체결

*********************************

※ 붙임 :***** 각 1부.  끝.