작업지시 취소 보고(노후밸브 90 외 2건)

문서번호	급수운영과-22605
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관	급수관리팀장	급수운영과장
	이기명	代이기명	代박상열

“2022년 마포구 관내 상수도시설물 정비공사”의 작업지시 건에 대하여 아래와 같이 작업지시를 취소하고자 아래와 같이 보고합니다.

2023. 12. 11.

보고자: 지방시설주사  성명: 이기명

건  명

작업지시 취소 보고(노후밸브 90 외 2건)

내용

작업지시 개요

작업지시번호	공사위치	공종	작업기간
노후밸브 90	***********	*******	************************
노후밸브 92	********	*******
노후밸브 95	***********	******

2. 보고내용

- 간선도로 특성 상 야간 작업구간으로 포장면적이 소규모이고 동절기 기온 강하에 따른 야간 아스콘 생산이 안되고 있어 작업이 불가하므로 작업기간내 공사완료가 어려운 실정에 따라 작업지시를 취소하는 것이 타당하다고 사료됨.

3. 조치의견

- 위와 같은 사유로 작업지시를 취소하고 2024년에 재 작업지시하여 정비

하고자 함.

붙임  실정보고 1부.  끝.