문서번호	시설관리과-20236
결재일자	2023. 12. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
최형선		조규환	12/11
			이규현
협조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

설계변경 심의위원회 개최

(삼양동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사)

2023. 12.

북부수도사업소

설계변경 심의위원회 개최

『삼양동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사』에 대하여 신규공종 및 시공물량 증·감 발생에 따른 설계변경 심의위원회를 개최계획을 보고 드림

1. 일반현황

가. 공 사 명 : 삼양동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사

나. 공사개요

- 당 초: 상수도관 부설 D=80∼300㎜, L=970m

- 변 경: 상수도관 부설 D=80∼300㎜, L=747m

다. 공사기간: 2023. 4. 17. ~ 2023. 12. 18.

라. 계약금액

- 당 초: *******************************

- 변 경: ***************************

마. 계약상대자: **************

2. 심의회 개최

가. 심의일정: 2023. 12. 11.(월) 16:00

나. 심의장소: 북부수도사업소 시설관리과

다. 심의위원: 위원장(시설5급 이규현)

간  사(시설6급 조규환)

위  원(시설6급 최호림, 시설7급 홍민표, 시설7급 진하영)

3. 심의내용

가. 계약물량 증·감 및 신규공종 따른 설계변경 적정여부

나. 계약변동(증·감) 수량, 신규공종 단가 낙찰률 범위내 적용 적정여부 등

다. 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4. 설계변경 내역

가. 시공물량 증·감에 따른 변경

- 공사 중 물량 증감 : 아스팔트 포장절단(200㎜이하) 등 245공종

- 신규공종: 부단수천공 분기점분기(150*연결관 13~20mm) 등 21공종

구 분	당초(원)	변경(원)	증 · 감(원)	비 고
도 급 비	537,197,100	341,440,000	감) 195,757,100
공급가액	488,361,000	310,400,000	감) 177,961,000
부 가 세	48,836,100	31,040,000	감) 17,796,100

5. 행정사항

○ 설계변경 사항에 대하여 적법성 여부를 검토 및 심의하고 그 결과를 설계변경에 반영 시행하고자 함

붙임  1. 설계변경사유서 1부.

2. 설계변경심의신청서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 검증확인서 1부.  끝.