문서번호	도로보수과-13238
결재일자	2023. 12. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	강서도로사업소장
서효원	안동국	12/11
		이경우

「23년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)」

준공기한 연기 검토 보고

2023. 12.

강서도로사업소

도로보수과

「23년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)」

준공기한 연기 검토 보고

우리사업소 추가공사(개화동로 개선, 자전거 도로정비, 사후포장)및 규제심의, 민원 등작업물량 증가에 따른 추가일정필요로 '23년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)에 대한 준공기한 연기 검토 보고임

1		용역 개요

○ 용역명 : 23년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)

○ 용역기간 : 2023.04.06 ~ 2023.12.15

○ 계약업체 : 진원피앤씨(주) 대표 엄재열, 엄성수

○ 공 사 비                                                (단위: 원)

*****	***	***
*************	****	***********

2		보고 내용

○ 준공기한 연기

- 준공기한

구 분	*****	*****	비고
용역기간	**********************	**********************

- 연기사유

*******************************

3		조치 계획

○ 상기 보고와 같이 추가공사 필요기간이 예상되어 절대공기가 부족한 실정으로 준공기한 연기

- 준공기한  ******************************

******************************

- 귀책사유 : 서울특별시

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.