문서번호	토목부-23290
결재일자	2023. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
노승환		박운용	12/08
			代최진우
협조
	주무관		이나영

강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사

환경보전방안 검토 및 사후환경영향조사 용역

계약금액 및 기간 조정 검토보고

2023. 12.

도시기반시설본부

(토    목    부)

강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사 환경 보전방안 검토 및 사후환경영향조사 용역

계약금액 및 기간 조정 검토보고

강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사 사업기간 조정에 따라 환경보전 방안 검토 및 사후환경영향조사 용역의 계약금액 및 기간 조정 검토 보고임

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설사업 환경보전 방안 검토 및 사후 환경영향 조사 용역

ㅇ 규    모 : 환경 보전방안 및 사후환경영향조사(강남순환도시고속도로 4, 8공구)

ㅇ 도 급 비 : 731,940천원 (13차 149,336천원)

ㅇ 용역기간 :＇10.06.15 ~＇28.12.31 (13차 :＇22.01.01 ~＇23.12.31)

ㅇ 용 역 사 : ㈜천일

□ 계약 변경 현황

ㅇ ʼ14.12.03(1차) :

- 준공기한 : '17.05.31. → ʼ21.07.31. [증 4년 2개월]

- 용 역 비 : 185,780천원 → 306,800천원[증 121,200천원]

ㅇ ʼ18.07.30(2차) :

- 준공기한 : '21.07.31. → ʼ25.12.31. [증 4년 5개월]

- 용 역 비 : 306,800천원 → 441,400천원 [증 134,60천원]

ㅇ ʼ21.05.12(3차) :

- 준공기한 : '25.12.31. → ʼ26.12.31. [증 1년]

- 용 역 비 : 441,400천원 → 437,000천원[증 4,400천원]

ㅇ ʼ21.10.18(4차) : 과업 추가(강남순환4공구 사후환경영향조사 용역)

- 용 역 비 : 437,000천원 → 669,000천원[증 232,000]

ㅇ ʼ21.11.25.(5차) :

- 준공기한 : '26.12.31. → ʼ27.12.31. [증 1년]

- 용 역 비 : 669,000천원 → 693,300천원 [증 24,300천원]

ㅇ ʼ22.12.16.(6차) :

- 준공기한 : '27.12.31. → ʼ28.12.31. [증 1년]

- 용 역 비 : 693,300천원 → 731,940천원 [증 38,640천원]

□ 변경 내용

ㅇ 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사의 사업 기간이 과천시 보상지연으로 인해 6개월 연장 필요함에 따라 당 용역의 계약금액 및 기간 조정이 필요한 실정임.

□ 계약금액 조정내용

ㅇ 총차 7회                                          (단위 : 원)

구 분		금 액			비고
		당 초	변 경	증 ․ 감(△)
계		731,940,000	751,600,000	19,660,000
도급비	공 급 가 액	665,400,000	683,272,728	17,872,728
	부 가 세	66,540,000	68,327,272	1,787,272
	소 계	731,940,000	751,600,000	19,660,000
용역 기간		ʼ10.06.15~ʼ28.12.31	ʼ10.06.15~ʼ29.06.30	증 6개월

- 변경 내용(총차)

(8공구) [공사 시] `10.06. ~ `23.12. →  `10.06 ~ `24.06. (증 6개월)

[운영 시] `24.01. ~ `28.12. →  `24.06. ~ `29.06. (증 6개월)

(4공구) 변경 없음

(13차수) 변경 없음, 준공 후 14차수 발주 예정

□ 조치계획

ㅇ 계약금액 및 용역 기간 변경 내역 검토 결과 적정하다고 판단되며 용역 변경계약을 통한 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 계약금액 조정 내역 각 1부(합의각서 포함).  끝.