아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	용역 완수기한 변경계약 체결 보고(북부수도사업소 청사 승강기 실시설계 용역)

1. 행정지원과-21214(2023. 12. 7.)호와 관련입니다.

2.『북부수도사업소 청사 승강기 실시설계 용역』건에 대하여 완수기한 변경계약(2차)을 아래와 같이 체결하였음을 보고합니다.

가. 건      명 : 북부수도사업소 청사 승강기 실시설계 용역북부수도사업소 관내(노원, 도봉구) 교통소통대책 수립용역

나. 계약상대자 : **************************

다. 계약금액 : ***************************

라. 계약기간

당 초	변 경	비 고
2023. 8. 11. ~ 2023. 12. 27. (최초 완수기한 : 2023. 11. 18.)	2023. 8. 11. ~ 2024. 1. 31.	완수기한 연기 (착수일 : 2023. 8. 21.)

****************************

붙 임  1) 용역 변경계약서 1부.

2) 변경 계약보증서

3) 합의서 1부.

4) 준공기한 연기보고서 1부.

주무관	구명임		행정관리팀장	박은화		행정지원과장	代박은화		북부수도사업소장	12/08
권태규
협조자	주무관	김재훈
시행	행정지원과-21307	(	2023. 12. 8.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, (번동)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3245	/전송	02-3146-3279	/	mymullu@seoul.go.kr	/	부분공개(7)