아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	물품 계약변경 요청

1. 도로보수과-12009(2023.10.27.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행중인 「고내구성 칼라 아스콘 구매-서부」와 관련하여 관급자재에 대한 특허기술사용료 계상 및 납품기한 연기에 대하여 계약변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 특허기술사용료 계상

계약건명	품 명	당 초		변 경		증･감
		수량(톤)	금 액(원)	수량(톤)	금 액(원)
*****************	**** ****	*****	*************	*****	*************	****
	*******	*	*	**	***********	*************
	**		*************		*************	*************

나. 납품기한 변경 : (당초)2023.12.31. → (변경)2024. 5. 31.

다. 변경사유 : 당초 누락된 특허기술사용료 포함 및 공사완료 시기 미도래

라. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물관리, 노후포장도로 정비, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 계약의뢰 공문 1부.

2. 물품계약서 1부.

3. 관련 방침서 1부.  끝.

	도 로 보 수 과 장
주무관	김철홍		도로보수과장	12/08
유은중
협조자	주무관	맹우재
시행	도로보수과-13836	(	2023. 12. 8.	)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 (상암동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8352	/전송	02-300-8365	/	kchong@seoul.go.kr	/	부분공개(5)