문서번호	디자인정책담당관-13977
결재일자	2023. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	디자인전략팀장	디자인정책담당관
황상미	여은하	12/08
		이창현

- 지하철 유휴공간 혁신 프로젝트 -

용역계약 변경계획

2023. 12. 8. (금)

디자인정책관

(디자인정책담당관)

- 지하철 유휴공간 혁신 프로젝트 -

용역계약 변경계획

디자인정책담당관 :이창현☎2133-2700 디자인전략팀장 : 여은하☎2720 담당 :황상미☎2721

지하철 역사 여의나루역을 러너스테이션으로 조성하는 ‘지하철 유휴공간 혁신 프로젝트’ 용역의 준공기한 연장을 위한 계약변경 내용을 보고드림.

Ⅰ		추진근거

□「지하철 유휴공간 혁신 프로젝트 추진계획」(디자인정책담당관-8310, ’23.7.18)

□ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 (행정자치부 예규 제35호)

Ⅱ		용역개요

□ 계약건명 : 지하철 유휴공간 혁신 프로젝트

□ 계 약 자 : *********

□ 계약금액 : **************

□ 계약기간 : *********************

□ 사업내용 : 여의나루역 러너스테이션 조성

Ⅲ		추진경위

□ ’23. 7월     : 추진계획 수립

□ ’23. 7~8월   : 사전절차 이행(계약심의, 일상감사)

□ ’23. 8~9월    : 재무과 협의, 용역사 선정

□ ’23. 10~11월 : 착수보고 및 중간보고

Ⅳ		변경계획

□ 변경사유

*************************************

**************************************************************************************************

□ 변경내용 : 계약기간 연장

구 분	변경전	변경후	비 고
용역기간	**********************	*********************	******
용역금액	**************	**************	****

□ 계약상대자 귀책사유 및 지체상금 : ****

Ⅴ		향후일정

□ ’23. 12월 11일	: 변경계약 체결 의뢰

붙임 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 변경계약 합의각서 1부.  끝.