문서번호	급수운영과-10524
결재일자	2023. 12. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	급수부장
박찬종	이상환	12/08
		송헌영
협 조
	주무관		류동경

『2023년 수질자동측정기 유지보수 용역』

설계변경 심의 결과보고

2023. 12.

급  수  부

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

『2023년 수질자동측정기 유지보수 용역』

설계변경 심의 결과보고

급수부장 :송헌영☎3146-1401 급수운영과장 :성기옥☎1460 담당 :박찬종☎1461

2023년 수질자동측정기 유지보수 용역 설계변경에 대한 심의를 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		추진근거

□ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제14장 6절(용역계약 집행기준)

□ 2023년 상수도사업본부 계약심사 추진계획(본부장방침, 안전조사과-895, 2023.1.27.)

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명 : 2023년 수질자동측정기 유지보수 용역

□ 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.(12개월)

□ 계약금액 : 230,100천원

□ 계약업체 : 유림테크(주) 외1 (블루센 주식회사)

□ 용역내용 : 측정기(171대) 정기점검 및 수시점검 등

Ⅲ		설계변경 심의

□ 심의회 개요

ㅇ 일    시 : 2023. 12. 8.(금) 10:00 ~15:00

ㅇ 장    소 : 본부 4층 소회의실

- 위원장 : ******

- 위  원 : **************************************

□ 심의내용

ㅇ 주요 설계변경 내용

항목	점검수량	점검횟수	금액	감액
변경전	189대	2,268회	232,100,000	10,847,600
변경후	171대	2,162회	221,252,400

- 이전계획에 따른 가동중단으로 점검제외 1대 : 지금배수지(1월~12월)

- 노후 측정기 교체로 인한 점검 제외 17대

- 계약금액 변경

(단위 : 천원)

※ 유지보수 대상 측정기 감소에 따른 점검횟수  106회 감소

- 유지보수 점검 제외 내역

월별	사업소	지 점 명	구 분	개소	사 유
1월 (감3건)	남부	백산초등학교	감소	1	노후측정기 교체
	강남	양재가압장(유입)	감소	1	동파예방 운휴
	강북	지금배수지	감소	1	위치이전 계획
2월 (감3건)	남부	백산초등학교	감소	1	노후측정기 교체
	강남	양재가압장(유입)	감소	1	동파예방 운휴
	강북	지금배수지	감소	1	위치이전 계획
3월 (감3건)	남부	백산초등학교	감소	1	노후측정기 교체
	강남	양재가압장(유입)	감소	1	동파예방 운휴
	강북	지금배수지	감소	1	위치이전 계획
4월 (감4건)	남부	백산초등학교	감소	1	노후측정기 교체
	강남	양재가압장(유입)	감소	1	동파예방 운휴
	서부	길마어린이공원	감소	1	화장실 리모델링
	강북	지금배수지	감소	1	위치이전 계획

월별	사업소	지 점 명	구 분	개소	사 유
5월 (감3건)	남부	백산초등학교	감소	1	노후측정기 교체
	서부	길마어린이공원	감소	1	화장실 리모델링
	강북	지금배수지	감소	1	위치이전 계획
6월 (감3건)	남부	백산초등학교	감소	1	노후측정기 교체
	서부	길마어린이공원	감소	1	화장실 리모델링
	강북	지금배수지	감소	1	위치이전 계획
7월 (감4건)	남부	백산초등학교	감소	1	노후측정기 교체
	서부	길마어린이공원	감소	1	화장실 리모델링
	서부	연희배수지	감소	1	배수지 공사
	강북	지금배수지	감소	1	위치이전 계획
8월 (감9건)	남부	백산초등학교	감소	1	노후측정기 교체
	서부	길마어린이 공원	감소	1	화장실 리모델링
	서부	연희배수지	감소	1	배수지 공사
	서부	공덕초등학교	감소	1	노후측정기 교체
	강서	등서초, 등양초	감소	2	노후측정기 교체
	중부	한강초, 용암초	감소	2	노후측정기 교체
	강북	지금배수지 → 응암배수지	감소	1	위치이전 설치
9월 (감12건)	남부	백산초등학교	감소	1	노후측정기 교체
	서부	길마어린이 공원	감소	1	화장실 리모델링
	서부	연희배수지	감소	1	배수지 공사
	서부	공덕초, 송죽원, 경성고	감소	3	노후측정기 교체
	강서	등서초, 등양초, 화곡배수지	감소	3	노후측정기 교체
	중부	한강초, 용암초	감소	2	노후측정기 교체
	강북	지금배수지 → 응암배수지	감소	1	위치이전 설치
10월 (감21건)	남부	백산초, 물새어린이공원, 상도배수지유입	감소	3	노후측정기 교체
	남부	모래내공원	감소	1	공원 공사
	서부	길마어린이 공원	감소	1	화장실 리모델링
	서부	연희배수지	감소	1	배수지 공사
	서부	공덕초, 송죽원, 경성고	감소	3	노후측정기 교체
	북부	공덕초, 수유3동	감소	2	노후측정기 교체
	강서	등서초, 등양초, 화곡배수지,국립국어원	감소	4	노후측정기 교체
	중부	한강초, 용암초	감소	2	노후측정기 교체
	강남	논현초, 대헌초	감소	2	노후측정기 교체
	강동	명일초	감소	1	노후측정기 교체
	강북	지금배수지 → 응암배수지	감소	1	위치이전 설치
11월 (감21건)	남부	백산초, 물새어린이공원, 상도배수지유입	감소	3	노후측정기 교체
	남부	모래내공원	감소	1	공원 공사
	서부	길마어린이 공원	감소	1	화장실 리모델링
	서부	연희배수지	감소	1	배수지 공사
	서부	공덕초, 송죽원, 경성고	감소	3	노후측정기 교체
	북부	공덕초, 수유3동	감소	2	노후측정기 교체
	강서	등서초, 등양초, 화곡배수지,국립국어원	감소	4	노후측정기 교체
	중부	한강초, 용암초	감소	2	노후측정기 교체
	강남	논현초, 대헌초	감소	2	노후측정기 교체
	강동	명일초	감소	1	노후측정기 교체
	강북	지금배수지 → 응암배수지	감소	1	위치이전 설치

심의 검토사항	세부내용
계약변경 타당성	변경 사유발생 원인, 적용 등의 타당성
계약변경 세부 내용	세부 변경 내용(증감 내용)
변경물량 산출 적정	물량 증감에 따른 과업비 산출 적정성
각종 제반 규정 준수 여부	지방자치 단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 등

월별	사업소	지 점 명	구 분	개소	사 유
12월 (감20건)	남부	백산초, 물새어린이공원, 상도배수지유입	감소	3	노후측정기 교체
	서부	길마어린이 공원	감소	1	화장실 리모델링
	서부	연희배수지	감소	1	배수지 공사
	서부	공덕초, 송죽원, 경성고	감소	3	노후측정기 교체
	북부	공덕초, 수유3동	감소	2	노후측정기 교체
	강서	등서초, 등양초, 화곡배수지,국립국어원	감소	4	노후측정기 교체
	중부	한강초, 용암초	감소	2	노후측정기 교체
	강남	논현초, 대헌초	감소	2	노후측정기 교체
	강동	명일초	감소	1	노후측정기 교체
	강북	지금배수지 → 응암배수지	감소	1	위치이전 설치

ㅇ 주요 심의 사항

□ 심의결과 : 적정

Ⅳ		향후계획

□ 2023. 12. 11. : 설계변경 합의(용역사 합의서 제출)

□ 2023. 12. 11. : 설계변경에 따른 변경계약 의뢰(재무회계과)

□ 2023. 12. 15. : 용역준공