문서번호	시설관리과-22680
결재일자	2023. 12. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
최경철		김재영	12/11
			代김재영
협조

사토장 변경 검토보고

(2023년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전 보수공사)

2023.  12.

강남수도사업소

(시설관리과)

사토장 변경 검토보고

「2023년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전 보수공사」와 관련하여 **************로부터 사토장 위치변경 실정보고가 접수되어 검토결과를 보고 드림

□ 관련공문

○ 토사 협의요청 관련 회신【수도권매립지관리공사 매립부-2358('23.8.21.)】

○ 사토장 변경계획 보고【시설관리과-15774('23.8.29.)】

○ 실정보고 제출(사토장 변경)【대콘-57('23.12.7.)】

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2023년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전 보수공사

*********************************

************************

*************************

********

- ***********************************

- *****************

□ 변경사유

*************************************************************

****************************************************************************,

*******************************************************************************************

□ 검토의견

○ 상기 공사현장의 발생토사에 대한 반입 가능한 대체 사토장이 필요

○ 사토장 선정 및 현장실사

구 분	위 치	거 리
당 초	*******	******
변 경	********************	********

- 개발행위허가증 및 기타서류 적정 확인

○ 공사비 증·감 비교

(단위 : 원)

공 종	수량	단위	당초 (47.5km) 집하장→매립지		변경 (59km) 집하장→(변경)사토장		비 고
			단 가	금 액	단 가	금 액
잔토처리	*****	*	******	**********	******	**********	***********

○ 운반거리, 운반속도 등을 적정하게 산정한 것으로 판단되므로, 설계변경시 반영하여 정산하고자 함

□ 행정사항

○ 사토장 변경에 따른 승인통보

- 변경된 사토장에 대하여 ************* 및 ***************에 승인 통보

○ 설계변경 적용시행

- 향후 설계변경 시 공사비 증·감사항에 대하여 적용 시행

붙임  1. 현장실정보고서 1부.

2. 사토장 변경 요청 공문 1부.  끝.