문서번호	도시철도건축부-9681
결재일자	2023. 12. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축공사과장	도시철도건축부장
김영준		김광기	12/11
			임우진
협조
	주무관		강지영

「별내선(8호선연장)1공구 건설공사」

건축공사 설계변경 실정보고 검토

2023.12.

도시기반시설본부

(도시철도건축부)

「별내선(8호선 연장) 1공구 건설공사」

건축공사 설계변경 실정보고 검토

별내선(8호선 연장) 1공구 *******************에 따른 실정보고 검토임.

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

- 제9장 계약 일반조건, 제6절 공사 설계 변경

ㅇ 전기실 기기배치도 변경에 따른 협조요청[도시철도설비부-7280(’23.7.24.)호]

ㅇ 별내선 1공구 실정보고 승인요청[별내 감1-23-925(’23.12.8.)호]

□ 실정보고 내용

1. ******************************************************************************************

- 주요변경현황

구 분	당 초	변 경	비 고
***********	********** *****	********* *****	********** *************
***********	********	********	*********
****** ************	***	****	********** ********************
********* ************	**	**	***** *********

□ 실정보고 내용 검토

ㅇ 관련법규 검토

-「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제9장 계약 일반조건,

제6절 공사 설계 변경

: 1. 가. 4) 그 밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고        인정할 경우

ㅇ 공사내역 검토

- 공사변경내역

구 분	금 액(원)		증 감(원)
	변경전	변경후
*******	**********	**********	*************
*******	*********	**********	************
******	**********	**********	************
***	**********	*********	**********
****	**********	**********	************

- 단가적용 검토

****************************************************************

*************************************

*************************************************

************************************

**************************************

************

******************************

**************************************************

※ 수량산출서 및 상세내역서 별도첨부

ㅇ 건설사업관리단 검토 의견

- 발주기관요청에 의한 설계변경으로 수량 및 금액 검토하였으며 변경 금액은 차후 설계변경 시 반영함

□ 결과검토

ㅇ 관련 법규 및 내역검토 결과 건설사업관리단의 실정보고에 대한 승인이 타당하고 향후 설계변경 처리

□ 향후계획

ㅇ ’23.12. 실정보고 승인처리 (도시철도건축부 → 건설사업관리단)

ㅇ ’24.03. 공사 준공 시 내역반영 (6차공사)

붙 임 : 설계변경 실정보고 승인 요청 1부.  끝.