문서번호	급수운영과-19415
결재일자	2023. 12. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
유광창		최용진	12/11
			송병욱
협 조

설계변경 심의결과 보고

( 2023년 북부수도 관내 포장도로 굴착복구공사-1회 )

2023.  12.

북부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의결과 보고

우리사업소에서 시행중인『2023년 북부수도 관내 포장도로 굴착복구공사-1회』 에 대한 시공물량 증 ․ 감으로 인한 설계변경 사유가 발생됨에 따라 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

1. 공사 개요

가. 공 사 명 : 2023년 북부수도 관내 포장도로 굴착복구공사-1회

나. 공사개요

***********************************************************

************************************************************

다. 공사기간 : 총차 2023. 6. 29. ~ 2024. 6. 30 (변경없음)

라. 도 급 비

(단위: 원)

구 분	당초금액	변경금액	증 감액
총부기금액	*************	*************	-
1차수 금액	*************	***********	**************
2차수 금액	***********	***********	**************

마. 도 급 자 :************

2. 심의 개최

가. 심의일정 : 2023. 12. 11.(월)  09:30

나. 심의장소 : 북부수도사업소 급수운영과

다. 심의위원장 : 급수운영과장

라. 심의위원 : 시설6급 이문성, 시설6급 박상권, 시설7급 남상욱, 시설7급 조은성

3. 심의 내용

가. 물량변동의 적정성 여부

나. 각종 제반규정 적정 준수여부

다. 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4. 심의 결과

가. 설계변경의 타당성 : 타당함

나. 계약변동(증, 감)물량 계약단가 적정성 여부 : 적정함

다. 각종 제반 규정 적정 준수여부 : 적정함

라. 제경비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정함

마. 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 적정함

5. 조치 의견

위와 같이 설계변경 내역을 심의한 결과 설계변경이 타당하고 검토항목이 적정하여 본 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 변경계약을 의뢰코자 합니다.

붙임  1. 설계변경 심의회 개최 및 심의 결정서 1부.

2. 설계변경사유서 1부.

3. 설계변경내역서 1부. 끝.