문서번호	공원녹지과-27677		주무관		조경담당	공원녹지과장		도시관리국장
결재일자	2023. 12. 11.		정지원		구경만	김병완		12/11
공개여부	대시민공개							代김영욱
방침번호			협조
방침번호
				예산담당			정영임

- 보문로 가로정원 조성사업 - 사고이월 검토보고

2023. 12.

도시관리국

(공원녹지과)

보문로 가로정원 조성사업 사고이월 검토보고

우리구에서 시행하고 있는 「보문로 가로정원 조성사업」과 관련, 회계연도 내 지출하지 못한 예산에 대하여 사고이월을 추진하여 원활한 예산집행과 사업추진을 하고자 함.

□ 추진근거

○ 지방재정법 제50조(세출예산의 이월) 및 같은 법 시행령 58조

○ 서울특별시 성북구 재무회계규칙 제17조(이월예산의 집행)

○ 2023년 회계연도 세출예산 사고이월 추진계획  ※ 기획예산과-14602(2023.11.29.)

○ 보문로 가로정원 조성사업 시행  ※ 공원녹지과-26182(2023.11.23.)

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 보문로 가로정원 조성사업

○ 위    치 : 성북구 보문로(성북구청 앞 교차로 ~ 경동고등학교 교차로)

○ 사업기간 : 2023. 12. ~ 2024. 6.

○ 사업내용 : 가로수 아래 화단 정원 형태 조성, 노후 시설물 정비 등

○ 사 업 비 : 400,000,000원

(단위 : 원)

사 업 명	예산현액	용역비	공사비		집행잔액 (낙찰차액)
			도급비	관급비
보문로 가로정원 조성사업	400,000,000	22,353,000	204,266,000	150,314,480	23,066,520

○ 예산과목 : 공원녹지과, 환경을 생각하는 푸른성북 구현, 도심속 조경 확충, 가로수 생육환경 개선사업, 시설비및부대비, 시설비

□ 추진경위

○ 2023.09. : 추경예산 확보

○ 2023.10. ~ 11. : 현장조사 및 실시설계 용역

○ 2023.12. : 공사 시행

※ 서울시 도로굴착 통제 시행으로 공사 중지

□ 사고이월 계획

○ 예산현황

(단위 : 원)

사 업 명	예산과목 (통계목)	예 산 액	지 출 액	원인행위액 (원인행위미필액)	사고이월액
보문로 가로정원 조성사업	시설비	400,000,000	22,353,000	354,580,480 (23,066,520)	377,647,000

○ 사고이월액 : 금377,647,000원(금삼억칠천칠백육십사만칠천원)

○ 사고이월 사유

- 2023년 9월 추가경정 예산 편성 이후 실시설계, 일상감사, 공사 발주 등 관련 행정 절차 이행을 신속히 시행하여 11월 말까지 모든 사항을 완료하였으나

- 공사계약 및 착공 시기가 동절기로 사업 시행 및 수목 식재가 불가하여 부득이하게 동절기 공사 중지 기간(12 ~ 2월) 이후 사업을 시행하고자 사고이월을 추진함

※ '23/'24년도 동절기 도로굴착통제 시행 알림 서울특별시 도로관리과-7671(2023.11.10.)호

□ 향후계획

○ 2023. 12. 15. : 사고이월 요청(공원녹지과)

○ 2024. 1. 10.  : 사고이월확정(기획예산과)

○ 2024. 3. ~ 6. : 공사 시행 및 완료

붙임  사고이월 요구서 및 사고이월명세서 각 1부.  끝.