아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	총무부장
(경유)
제목	변경계약 의뢰[내부순환로(월곡IC) 구조개선 전기공사]

우리 본부에서 추진 중인「내부순환로(월곡IC) 구조개선 전기공사」와 관련하여 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명: 내부순환로(월곡IC) 구조개선 전기공사

2. 계 약 자: 주식회사 게이앤엠전력

3. 변경내용: *****및 준공기한 변경

구 분		당 초	변 경	증·감
계약 금액	총차	금116,584,410원	금158,859,000원	(증)금42,274,590원
	3차	금90,135,410원	금123,946,000원	(증)금33,810,590원
계약 기간	총차	2021.7.12.~2023.12.31.	2021.7.12.~2024.6.30.	증 6개월(182일)
	3차	2023.6.12.~2023.12.31.	2023.6.12.~ 2024.6.30.	증 6개월(182일)

4. 변경사유: 민원에 따른 신규물량에 반영 및 토목공정 연장에 따른 준공기한 연기

붙임  1. 변경 검토보고서 1부.

2. 감리단 검토의견서 1부.

3. 변경내역서(총차, 1차) 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	황필권		설비설계과장	조기성		설비부장	12/11
신용휴
협조자
시행	설비부-20108	(	2023. 12. 11.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 6층 교통운영과	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3156-3040	/전송	02-2133-1053	/	discontinue@seoul.go.kr	/	부분공개(5)