문서번호	기전과-9239
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박건우		12/12
		문동하
협조

『23~24년 경관조명 유지보수공사(연간단가)』

설계변경 검토 보고

2023. 12.

성동도로사업소

(기전과)

『23~24년 경관조명 유지보수공사(연간단가)』

설계변경 검토 보고

『23~24년 경관조명 유지보수공사(연간단가)(1차)』시행 중 물량변동이 있어 아래와 같이 설계변경을 실시하고 준공 처리하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 23~24년 경관조명 유지보수공사(연간단가)(1차)

○ 계약금액 : ************

○ 계약기간 : 2023. 7. 1. ~ 2024. 6. 30.

- 금회계약금액 : ************

- 금회계약기간 : 2023. 7. 1. ~ 12. 31.

○ 공사내용 : 한강교량 및 일반교량 경관조명 유지보수공사 1식

○ 계약업체 : ******************

□ 설계변경 개요

○ 설계변경 사유

- 공사 추진과정 중 변경된 물량 적용

- 공사원가계산서상의 각종 보험료 및 제경비 정산

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구분(총차)		계약액	변경액	증, 감(△)	비고
도급비	공급가액	**********	**********	-
	부가가치세	*********	*********	-
	합계	**********	**********	-

○ 주요 변경 내역

연번	내용	변경전	변경후	증, 감(△)	비고
1	LED등기구 세척	***	****	****
2	전선관 배관	****	***	****
3	안정기 교체	***	****	****
4	전력케이블 신설	**	****	****
5	LED 컨버터 교체	***	***	****
6	램프 교체	****	****	****
8	누전선로 탐사	***	***	****
9	등기구 교체	****	**	*****
10	각종 보험료(건강보험료, 연금보험료 등) 정산

□ 보고자 의견

○ 변동내역에 의거 설계변경을 시행하여 준공 처리하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율검증 확인서 1부.

3. 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.  끝.