문서번호	치수과-4537
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
이민호		김창신	12/12
			이유국
협 조

2023년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

설계변경(3회) 시행보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

미 래 한 강 본 부

(시설부 치수과)

2023년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

설계변경(3회) 시행 보고

시설부장 :이유국☎3780-0830 치수과장 : 김창신☎0682 담당 : 이민호☎0695

『2023년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)』의 설계변경(3회)   시행 계획에 대하여 보고 드림.

□ 사 업 개 요

ㅇ 공  사  명 : 2023년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

ㅇ 위      치 : 한강공원 내(나들목, 제방, 수중보 등)

ㅇ 사업기간 : 2023. 03. 07. ~ 2024. 02. 28.

ㅇ *********************

ㅇ ***************************

ㅇ 공사개요 : 나들목 보수, 한강제방 정비 및 뻘청소 등

□ 설계변경 개요

ㅇ 관련근거

- 잠실수중보 보수·보강공사 사업계획 변경 검토보고 [본부장 방침 치수과-804호(2023.7.26.)]

- 여의도 순복음교회 나들목 정비계획 [치수과-2978호(2023.10.16.)]

- 작업지시(6차) 검토보고[치수과-333호(2023.7.12.)]

- 작업지시(7차) 검토보고[치수과-2202호(2023.9.12.)]

- 작업지시(8차) 검토보고[치수과-3176호(2023.10.20.)]

- 작업지시(9차) 검토보고[치수과-3708호(2023.11.9.)]

ㅇ 설계변경 사유

- 안전점검 결과에 따른 한강 제방 배수로 정비 등

- 여의도 순복음교회 나들목 정비공사 에 따른 물량 증·감 및 신규공종 반영

- 작업지시에 따른 공종별 물량 증·감 및 신규공종 반영

ㅇ 직접공사비 변경

(단위: 원)

공 종	수량	단위	재료비	노무비	경 비	합 계	증·감
******** *****	*	*	***********	***********	**********	***********	***************
			***********	***********	**********	***********
*****	*	*	*******	**********	*********	**********	**************
			*******	*********	*********	*********
******	*	*	**********	**********	**********	***********	**************
			**********	**********	**********	***********
*******	*	*	*********			*********	***************
			**********			**********
******* *****	*	*	**********	**********	*********	***********	***************
			***********	************	*********	***********
******	*	*	**********	***********	***********	***********	*
			**********	***********	***********	***********

ㅇ 공사비 증·감 현황

(단위: 원)

****	***	**	****	비 고
****	*************	*************	***************
*****	*************	*************	***************
*****	***********	**********	***************
*****	**********	**********	***************

□ 조치계획

ㅇ 상기와 같이 설계변경을 시행하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함

ㅇ 변경계약 시행 요청(치수과 → 총무과)

- 도 급 액 : 3,116,200천원 → 3,598,260천원(증 482,060천원)

► 한강공원관리및운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 한강공원접근시설유지관리, 시설비및부대비, 시설비(증 380,000천원) ※집행잔액 활용

► 미래한강본부 치수과, 재해및재난예방, 재난예방및복구, 응급복구(재난관리기금 재난계정) 시설비및부대비, 시설비(감 97,940천원)

► (국비) 치수안전과, 치수 및 하천관리, 수방대책 사업, 국가하천유지보수, 시설비및부대비, 시설비(증 200,000천원)

붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 계약금액 검증확인서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 설계변경 자문위원 심의결과서 1부.  끝