문서번호	방재시설부-15603
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김재웅		정현중	12/12
			代정현중
협 조
	주무관			김광호

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

설계변경[총차 6회, 4차 1회] 검토 보고

2023. 12.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

설계변경(총차 6회, 4차 1회) 검토 보고

「국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사」의 실정보고 승인내용 및 현장여건 변경에 따른 설계변경(총차 6회, 4차 1회) 검토보고 임

※ 관련근거 : 이산(S)2023-8271호(2023.12.12.)

1		용역개요

ㅇ 공 사 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사

ㅇ 위    치 : 양천구 신월IC ~ 화곡 지하차도 BOX 시점

ㅇ 사업규모 : 도로연장 1.22km, 왕복4차로 (지하차도 신설 995m)

ㅇ 공사기간 : 총차 2018. 8. 8. ~ 2024.12.31.(착공일로부터 77개월)

4차 2022.12.15. ~ 2023.12.31.(착공일로부터 12.5개월)

ㅇ 도 급 비 : 총차 103,595백만원(공사비 91,827백만원, 관급 11,768백만원)

4차  16,750백만원(공사비 14,731백만원, 관급 2,019백만원)

ㅇ 시공/사업관리 : 한신공영(주) 외 1개사 / ㈜이산 외 3개사

ㅇ 공 정 률 : 2023.12.12. 기준 53.13%

2		검토내용

ㅇ 관련근거

- 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제13장 제6절 공사 설계의 변경

ㅇ 설계변경 사유

- 전체 6회 : 물가변동 반영 및 현지여건 변경과 관계기관 협의사항 반영

- 4차 1회  : 물가변동 반영 및 공사물량 조정 변경으로 절대공기 부족에 따른 공사기간 조정

ㅇ 세부 변경내용

- 총차분(6회 변경) 수량 증·감

구분	공 종		단위	수 량			금 액(백만원)
				당 초	변 경	증ㆍ감	당 초	변 경	증ㆍ감
중첩구간	토 공	흙 깍 기	m3	2,400	2,400	-	125	125	-
		토사운반	m3	1,636	1,636	-
		콘크리트 깨기	m3	1,541	1,541	-
	배수공	우수받이	개소	58	58	-	30	30	-
		연 결 관	m	232	232	-
	구조물공	콘크리트 타설	m2	21,510	21,510	-	5,776	6,050	274
		철근가공및조립	ton	2,859.104	2,859.104	-
		구조물방수	m2	22,774	22,923	149
		부력방지앵커	공	43	43	-
	가시설공	터 파 기	m3	116,631	116,631	-	15,534	16,228	694
		사토운반	m3	115,596	115,596	-
		미끄럼방지포장	m2	9,169	9,169	-
		가시설강재	ton	4,019.744	4,083.006	63.262
	포장공	보조기층	m3	5,176	5,176	-	340	356	16
		아스콘포장	m2	60,231	60,515	284
	교통안전시설 및 부대공	교통안전시설 및 부대공	식	1	1	-	3,721	4,411	690
잔여구간	토 공	사토운반	m3	76,449	102,594	26,145	2,070	2,676	606
	배 수 공	우수받이	EA	19	30	11	4	7	3
	구조물공	터파기	m3	-	97,610	97,610	7,864	8,161	297
		콘크리트 타설	m3	33,087	29,094	-3,993
		철근가공및조립	ton	4,370.146	3,541.708	-828.438
		구조물방수	m2	40,148	38,244	-1,904
	가시설공	복공판	m2	10,774	11,853	1,079	13,959	17,726	3,767
		차수공	m	24,957	27,177	2,220
		가시설강재	ton	6,328.036	6,785.711	457.675
	포 장 공	보조기층	m3	449	774	325	209	212	3
		아스콘포장	m2	11,557	11,478	-79
	부 대 공	부대공	식	1	1	-	1,469	3,107	1,638
	철 거 공	철거공	식	1	1	-	1,259	3,917	2,658
	상수관로 이설공사	상수관로 이설공사	식	1	1	-	1,392	1,392	-
	신호등 및 가로등 설치공	신호등 및 가로등 설치공	식	1	1	-	439	439	-
직접공사비			식	1	1	-	54,191	64,837	10,646
제 경 비							23,459	28,263	4,804
미확정설계공종(PS)							-3,906	-3,774	132
공기연장 추가간접비(1차)							349	349	-
물 가 변 동 (1차 ~ 7차)							10,231	14,321	4,090
신월여의지하도로 이관공사비							5,007	5,007	-
고용개선지원비							2,170	2,170	-
건설안전관리비							326	417	91
3D 드론촬영 및 관제시스템 운용							-	19	19
도 급 액							91,827	111,609	19,782
관급자재비							11,768	11,042	-726
폐기물처리비							556	611	55
총 공 사 비							104,151	123,262	19,111

- 4차분(1회 변경) 수량 증·감

구분	공 종		단위	수 량			금 액(백만원)
				당 초	변 경	증ㆍ감	당 초	변 경	증ㆍ감
중첩구간	토공	아스팔트깨기	m3	2,067	-	-2,067	38	-	-38
	구조물공	콘크리트 타설	m3	2,787	1,045	-1,742	743	512	-231
		철근가공및조립	ton	403	89	-314
		구조물방수	m2	4,280	957	-3,323
	가시설공	터 파 기	m3	10,109	2,634	-7,475	2,206	619	-1,587
		사토운반	m3	9,298	3,459	-5,839
		H-pile박기	본	137	137	-
		가시설강재	ton	606	72	-534
	교통안전시설 및 부대공	교통안전시설 및 부대공	식	1	1	-	485	461	-24
잔여구간	토 공	아스팔트깨기	m3	1,214	-	-1,214	512	579	67
		사토운반	m3	20,000	23,062	3,062
	구조물공	터파기	m3	21,130	23,062	1,932	1,205	398	-807
		줄파기	m	-	1,100	1,100
	가시설공	복공판설치	m2	3,835	8,749	4,914	4,419	5,563	1,144
		가시설강재	ton	2,189	2,859	670
	포장 및 부대공	부대공	식	1	1	-	242	695	453
	철 거 공	유압버스터	M3	-	2,086	2,086	231	3,129	2,898
직접공사비			식	-	-		473	3,824	3,351
제 경 비				1	1		3,849	4,420	571
미확정설계공종(PS)				1	1		-760	265	1,025
사토운반관리시스템				1	1		-	4	4
변경설계비				1	1		-	69	69
물 가 변 동 (1차 ~ 7차)				1	1		1,407	2,288	881
고용개선지원비				-	1		121	123	2
건설안전관리비				-	1		33	29	-4
품질시험비(복공판 품질시험)					1		-	81	81
신강보도육교 정밀안전점검비					1		-	21	21
공사중 전력요금					1		-	88	88
도 급 액				1	1		5,123	11,212	6,089
관급자재비				1	1		2,019	256	-1,763
폐기물처리비				1	1		250	200	-50
총 공 사 비				1	1		7,392	11,668	4,276

- 총차분(6회 변경) 총괄표

(단위 : 원)

구 분	금 액			비 고
	당 초	변 경	증 ㆍ 감
계	103,594,801,000	122,651,371,000	19,056,570,000
도 급 공 사 비	91,826,900,000	111,609,300,000	19,782,400,000	물가변동 : 4,762백만원 실정보고 : 15,020백만원
관 급 자 재 대	11,767,901,000	11,042,071,000	-725,830,000
공 사 기 간	`18.08.08~`24.12.31	`18.08.08~`24.12.31	-

- 4차분(1회 변경) 총괄표

(단위 : 원)

구 분	금 액			비 고
	당 초	변 경	증 ㆍ 감
계	16,750,000,000	19,600,432,400	2,850,432,400
도 급 공 사 비	14,731,000,000	19,344,900,000	4,613,900,000
관 급 자 재 대	2,019,000,000	255,532,400	-1,763,467,600
공 사 기 간	‘22.12.15~’23.12.31	‘22.12.15~’24.01.31	증 31일

ㅇ 4차분 현황도면

3		검토의견

ㅇ 책임건설사업관리기술자 검토의견

-「국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사」물가변동 반영과 현지여건 변경 등 관계기관 협의사항을 반영한 설계변경은 타당한 것으로 사료됨

ㅇ 보고자 검토의견

- 기승인된 실정보고 내용과 물가변동으로 인한 물량조정 등은 적정하며, 원활한 공정추진을 위한 사업기간 연장 등 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 설계변경 검토서 1부.  끝.