문서번호	토목부-23624
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
이나영		박운용	12/12
			이임섭
협조

- 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 - 설계변경(전체24회, 16차4회, 17차1회) 검토 보고

2023. 12.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 -

설계변경(전체24회, 16차4회, 17차1회)검토 보고

건설사업관리단으로부터 설계변경(전체24회, 16차4회, 17차1회) 요청이 있어 이에 대해 검토보고 드림.

*********************************************************

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사

○ 규    모 : 폭 4~8차로, 연장 18.8km

○ 도 급 비 : 361,595백만원

○ 공사기간 : '02.07.03. ∼ '24.12.31.

○ 시 공 사 : 롯데건설 외 1개사

○ 감 리 단 : (주)동명기술공단

□ 설계변경내용

○ 계약 변경 내용

(단위 : 천원)

****		*****	****	***
** ***	*****	***********	***********	***********
	****	*********************	*********************	****
*** **	*****	**********	**********	*******
	****	*********************	*********************	****
*** **	*****	**********	**********	*********
	****	********************	********************	*****

○ 설계변경 사유

- 전체24회 : 물가변동으로 인한 계약금액조정 반영

(도기시반시설본부-23-42035호)

- 16차4회 : 공종별 수량 조정, 보상 미완료 과천시 공사구간 물량삭제 및 물가변동 반영

- 17차1회 : 공종별 수량 조정, 물가변동 반영 및 금년예산 회기내 준공을 위한 공사기간 변경

○ 공사비 변경 사유

(단위:천원)

구분	내 용	공 사 비 (천원)			승인문서
		당 초	변 경	증 감(-)
1	물가변동으로 인한 계약금액 조정	-	4,235,000	4,235,000	도기본-23-42035호 ('23.11.30.)

○ 공사비 변경내역

(단위:백만원)

구 분	전체(24회)			16차(4회)			17차(1회)
	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
1.토공	14,355	14,355	-	1,072	1,072	-	561	455	-106
2.배수공	6,550	6,550	-	478	478	-	395	195	-200
3.구조물공	136,976	136,976	-	2,996	2,996	-	2,077	1,726	-351
4.포장공	12,070	12,070	-	2,849	2,849	-	60	59	-1
5.기계설비공	413	413	-	-	-	-	-	-	-
6.조경공	4,370	4,370	-	660	660	-	283	283	-
7.시상수도이설공	22,523	22,523	-	1,373	1,507	134	6,795	6,749	-46
8.부대공	29,743	29,743	-	8,098	7,854	-244	2,177	1,772	-405
9.교통시설물설치공	107	107	-	-	-	-	-	-	-
10.사급자재비	12,516	12,516	-	541	541	-	781	529	-252
직접공사비	239,623	239,623	-	18,067	17,957	-110	13,129	11,768	-1,361
제경비(E/S포함)	79,956	83,806	3,850	5,272	5,378	106	3,767	5,447	1,680
위탁공사	8,831	8,831	-	-	-	-	-	-	-
공급가액	328,410	332,260	3,850	23,339	23,335	-4	16,896	17,215	319
부가가치세	32,841	33,226	385	2,333	2,333	-	1,690	1,722	32
모범신호수	344	344	-	-	-	-	-	-	-
도 급 액	361,595	365,830	4,235	25,672	25,688	-4	18,586	18,937	351

□ 조치계획

○ 상기와 같이 물가변동에 따른 계약금액 조정 및 공사기간 변경을 반영하여 설계변경 시행코자 함

붙 임 : 건설사업관리단 설계변경 검토 보고서 1부. 끝.