문서번호	급수운영과-19547
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
박상권	代박상권	12/12
		代이문성
협 조

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

2022년 11월

북부수도사업소

급 수 운 영 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

우리사업소에서 추진중인 2023년 월계배수지 등 5개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역】신규공종이 발생됨에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고함.

1. 일 반 현 황

가. 용 역 명 : 2023년 월계배수지 등 5개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역

나. 용역개요 : 5개소

(월계배수지, 쌍문2가압장, 공릉배수지, 상계배수지, 중계아리수올림터)

❍ 5개소(배수지 3개소, 아리수올림터 2개소)

구분	안전 진단	대상시설물	위 치	용 량	준공 연도	평가 등급	내진평가 실시
배 수 지 (3)	진 단 (1개소)	월계배수지	노원구 마들로5가길 113 (월계동 산63-1)	100,000㎥	1988년	B	-
	점 검 (2개소)	공릉배수지	노원구 중계로 36 (공릉동 141번지)	170,000㎥	1998년	B	-
		상계배수지	노원구 상계동 산161-2	1,400㎥	1983년	B	-

구분	안전 진단	대상시설물	위 치	용 량	준공 연도	평가 등급	내진평가 실시
아 리 수 올 림 터 (2)	진 단 (1개소)	쌍문2 가압장	도봉구 쌍문동 137-59	1,047㎥	2006년	B	-
	점 검 (1개소)	중계 아리수올림터	노원구 중계동 27-25	425㎥	1986년	B	-

다. 용역기간 : 2023. 3. 15. ~ 12. 31(계약일 : 2023. 3. 10.)

라. 계 약 자 : (재)한국재난연구원 대표 윤영조

마. 용 역 비

- 당 초 : 158,550,000원

- 변 경 : 159,840,700원(증 1,290,700원)

2. 심의회 개최

가. 심의일정 : 2023년 12월 12일(월) 17:00

나. 심의장소 : 북부수도사업소 급수운영과

다. 위 원 장 : 시설6급 이문성

라. 심 의 자 : 시설7급 조은성, 시설6급 노제현, 시설7급 남상욱

3. 심의결과

1) 설계변경의 타당성 : 적정함

2) 신규공종 단가 산축 적정 여부 : 적정함

3) 계약변동(증·감)물량 계약단가 낙찰률 적정 적용 여부 : 적정함

4) 제경비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정함

5) 각종 제반규정 준수 여부 : 준수

붙임  1. 설계변경 심의 결정서 및 변경내역서 각1부.   끝.