문서번호	정수시설과-3706
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이용성		함태광	12/12
			代이혜진
협 조
	주무관			한미경

‘23~24년 입상활성탄 교체공사 사고이월 보고

2023.12.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

’23~24년 입상활성탄 교체공사 사고이월 보고

우리센터 ’23~24년 입상활성탄 교체 1차수 공사에 대하여 다음과 같은 사유로 사고이월 시행하여 품질확보 등 본공사 추진에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : ’23~24년 구의아리수정수센터 입상활성탄 교체공사(장기계속)     ❍ 공사기간 : ’23.11.10.~ ’24.04.30.

❍ 공사내용 : 입상활성탄 교체 1,980㎥(6개지 ; 1차수 3, 2차수 3)

❍ 계약금액 : ***************************************

❍ 계 약 자 : ***************

□ 추진현황

❍ 공사 착공계 접수 및 기술지도계약 완료

❍ 계약체결 후 본공사 추진을 위한 사전 준비 등

□ 사고이월 시행

❍ 사고이월 사유

- 본 공사 1차수(3개지분 990㎥) 공사는 당초 11월중 입상활성탄을 납품받아 교체공사 추진코자 하였으나,

- 교체를 위한 입상활성탄이 2023.12.11. 납품확정(합격)되어 회계연도 內 1차수 물량 교체공사 완료 및 준공처리를 하기 위한 절대공기 부족으로 사고이월 시행하여 추진

❍ 사고이월 금액

(단위 : 원)

공사명	총액	계약금액		사고이월액
		1차수(990㎥)	2차수(990㎥)
23~24년 입상활성탄 교체공사	***********	***********	***********	***********

□ 조치계획

❍ ’23년 1차수(3개지 990㎥, **************)공사에 대하여 사고이월    시행하여 품질확보 등 입상활성탄 교체공사에 만전을 기하고자 함.

※ 1차수 공사 완료 및 준공(예정) : 2024. 1월 중.

붙임 : 1. 23~24년 교체공사 계약체결 통보서 1부.

2. 23~24년 공사계약서 1부  끝.