문서번호	공간정보담당관-15667
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		지도서비스팀장	공간정보담당관
정은희		도찬구	12/12
			서미연
협조
	주무관		이용익

스마트서울맵 가상화 서버 이관 작업계획

2023. 12. 12. (화)

공간정보담당관

(지도서비스팀)

스마트서울맵 가상화 서버 이관 작업계획

공간정보담당관 : 서미연☎2133-2830 지도서비스팀장 : 도찬구☎2855 담당 :정은희☎2856

스마트서울맵 맵서버, DB서버 노후 장비를 가상화 장비로 이관하여 스마트서울맵 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 정보자원운영과-8903(2023.10.23.)호

ㅇ 2023년 정보자원 통합 관리 구축 사업 추진에 따른 민원행정 노후 가상화장비 및 NAS 스토리지 교체·이관 계획

Ⅱ		작업계획

□ 작업기간 : 2023.12.14(목) ~ 12.15.(금)

□ 작업대상 : 맵서버#1, 맵서버#2, DB서버#1, DB서버#2

□ 작업장소 : 공간정보담당관 사무실, 데이타센터

□ 작업계획

작업시간	작업계획	특이사항
18:00~18:10	WAS/WEB 서비스 종료	서비스 중단
18:10~18:20	DB서비스 종료	서비스 중단
18:20~19:20	Rsync를 통한 DB 데이터 복제 was의 DB 연결설정 및 지도 서버 연결설정 변경	서비스 중단
19:20~19:40	신규 DB서비스 기동
19:40~20:20	WAS/WEB 재기동 및 DB 접속 및 지도 서버 접속 점검
20:20~20:40	IP 변경 작업 진행 후 접속 점검	데이터센터
20:40~21:00	이관 작업 종료

□ 사전준비

ㅇ 접근통제시스템 등록 요청	: 11/28(화) 완료

ㅇ 정보보호시스템 룰 등록 요청	: 12/ 8(금) 완료

ㅇ 가상화 MAP서버 NAS 연결	: 12/ 8(금) 완료

ㅇ 가상화서버 DB 프로그램 설치 및 복제 테스트  : 12/11(월) 완료

ㅇ 가상화 MAP서버 타일 호출 및 POI 호출 테스트 : 12/11(월) 완료

ㅇ 가상화 서버 이전 관련하여 WAS 엔지니어 지원 : 12/12(화) 완료

- Jeus6 database 추가, application context-root 변경, 백업파일 생성 등

□ 작업실패 시 복구 계획

ㅇ 신규 가상화 서버 접속 실패시(12.14일, 20:20) IP변경 작업을 취소하고 즉시 원복하여 기존 서버로 스마트서울맵 운영

ㅇ 원인파악 후 이관 작업 재 실시(12.15일)

Ⅲ		행정사항 및 향후계획

□ 스마트서울맵 중단 공지(홈페이지) : 12. 11.(월) ~

□ 스마트서울맵 중단(예정) : 12.14.(목), 18시~21시

※ 중단시간은 2시간 내외로 예상하나, 작업 상황에 따라 변동될 수 있음

※ 스마트서울맵과 연계된 지도·API서비스 중단

□ 고도화사업 개발소스 테스트 : 12. 18.(월) ~ 20.(수)

붙임 1. 작업계획서 1부.  끝.