문서번호	급수운영과-19527
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		북부수도사업소장
조은성	代박상권	代이문성		12/12
				권태규
협 조

『덕릉로 장기사용 배수관 정비공사』 준공기한 연기 검토보고

2023. 12.

북부수도사업소

〔급수운영과〕

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『덕릉로 장기사용 배수관 정비공사』

준공기한 연기 검토보고

『덕릉로 장기사용 배수관 정비공사』와 관련, 계약상대자로부터 공사기한 연기요청서가 접수되어 이에 대해 검토 후 보고 드림.

※ 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-16752(2023.12.12.)호와 관련임.

1		공사현황

○ 공 사 명 : 덕릉로 장기사용 배수관 정비공사

○ 공사기간 : 2023. 08. 21 ~ 2023. 12. 18.

○ 도 급 비 : 502,937,350원

○ 공사개요

- 배수관로 : D=400mm, L=103m, D=200mm, L=11m,

- 관로추진 : D=400mm, L=41m

○ 도 급 자 : 태오건설(주) 대표 김병순

○ 발 주 청 : 북부수도사업소 급수운영과

2		공단 검토의견

◯ 공 정 율 : 5%(2023년 12월 12일 현재)

◯ 완료공종 : 횡단굴착 완료

◯ 잔여공종

- 배수관로 : D=400mm, L=103m, D=200mm, L=11m,

- 관로추진 : D=400mm, L=41m

◯ 준공기한 연기 사유(총 193일)

- 설계도서 미흡으로 인한 보완 작성 및 제출 : 133일

- 도로관리청(북부도로사업소) 동절기 포장공사 불가로 인한 굴착통제 : 60일

3		사업소 검토의견

◯ 검토의견

- 시설공단에서 보고한 준공기한 연기 요청은 타당한 것으로 판단되며, 잔여공정에 만전을 기하고자 함

4		처리의견

◯ 준공기한 연기 검토 결과

- 상기와 같은 사항으로 공사기간 연기가 불가피한 실정이기에 아래와 같이  준공기한을 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

구 분	기 간	비 고
당 초	2023년 08월 21일 ~ 2023년 12월 18일
변 경	2023년 08월 21일 ~ 2024년 9월 9일 (총 193일 연기)

◯ 지체상금 부과여부 : 미부과

- 준공기한 연기에 따른 귀책사유가 우리 사업소에 있는 바, 지체상금

미부과

붙임  준공기한 연기 검토보고 관련서류 각 1부.  끝.