문서번호

도로과-25717

주무관

도로조명팀장

도로과장

안전건설교통국장

박희요

이성일

전영호

12/12

등록일자

결재일자

2023. 12. 12.

代신용호

공개여부

대시민공개

협 조

「원효로동, 이촌동 노후 보안등 개량공사」 설계변경(정산)시행 검토 보고

용  산  구

(도 로 과)

원효로동, 이촌동 노후 보안등 개량공사

설계변경(정산)시행 검토 보고

우리 구에서 시행 중인 ｢원효로동, 이촌동 노후 보안등 개량공사｣와 관련하여 공사여건 및 시공물량 변경에 따른 설계변경(정산) 시행 검토 보고임

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 원효로동, 이촌동 노후 보안등 개량공사

□ 공사규모 : LED보안등 개량 438등, LED보안등 신설 2등

□ 공사기간 : 2023. 9. ~ 12.

□ 도 급 비 : 금262,317천원

□ 수급업체 : 동명전설 대표 최 오 렬

Ⅱ		보고내용

□ 설계변경 사유

○ 공사 현장 여건에 따른 실시공 물량 증․감 반영

- 낙찰차액 및 집행잔액 사용계획 보고(도로과-23295, 2023.11.09.)

○ 보험료 및 산업안전보건관리비 정산

구 분	당 초	변 경	증․감
총 공 사 비	464,239,780원	500,000,000원	증	35,760,220원
도 급 비	262,317,780원	304,170,500원	증	41,852,720원
관 급 비	184,319,990원	194,289,500원	증	9,969,510원
이 전 비	17,602,010원	1,540,000원	감	16,062,010원

□ 공사금액 변경 내역

□ 주요 물량 증감

공 종	규 격	단위	수량		증 · 감
			당초	변경
LED보안등 설치(신설)	한전주, LED 50W이하	등	2	1	감	1
등기구 철거	한전주, 100W 이하	등	438	559	증	121
점멸기 설치	한전주, 100W 이하	개	440	560	증	120
케이블 설치	600V F-CV 2.5㎟/4C	M	2200	1671	감	529
케이블 철거	600V F-CV 2.5㎟/4C	M	1975	1703	감	272
인입용 케이블 설치	600V F-CVV 2.5㎟/4C	M	30	1855	증	1825

○ 예산과목

- 도로과, 도로시설 관리, 도로조명 관리, 원효로동, 이촌동 노후 보안등 개량공사, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		조치계획

□ 상기 보고내용과 같이 계약물량 대비 실시공 물량 증․감 등 변경사항을 반영하여 설계변경(정산)을 시행하고자 함

붙임  1. 설계변경(정산) 내역서 1부.

2. 검증확인서 1부.

3. 관련 공문 1부.  끝.