문서번호	토목과-16780
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		보도관리팀장		토목과장		안전건설교통국장
이범찬		김남천		성규상		12/12
						신용철
협조
	재무과장		나재진
	계약팀장		황미란

「2023년 보도 유지보수 공사(단가계약)」 설계변경(최종) 검토보고

「2023년 보도 유지보수공사(단가계약)」 설계변경(최종) 검토보고

2023. 12. 11(월)

토  목  과

「2023년 보도 유지보수공사(단가계약)」

설계변경(최종) 검토보고

「2023년 보도 유지보수공사(단가계약)」의 신규공종 발생 및 공사물량 변경 사항에 대한 금년도 최종 설계변경 검토 보고임

1		공사개요

○ 공 사 명 : 2023년 보도 유지보수공사(단가계약)

○ 사업기간 :‘23. 3. 17 ~ 12. 31

○ 시 공 사 : 화신이앤씨(주) 대표 이명진

○ 도 급 비 : 1,503,309천원(시·구비)

○ 규    모

- 보도블록 포장 A=97.10a, 경계석 및 측구 정비 L=3,800m

- 아스팔트 포장 A=16a 등

○ 공 정 율 : 95%

2		추진경과

○‘23. 3.14.                    공사계약 및 착공

○‘23. 4. 7. ~  12. 6.        작업지시 및 작업완료(제1~9차)

○‘23. 7. 7.                   설계변경(1차) 시행 … 증 289,517천원

- 시비 재배정 예산 사업 설계반영 및 레미콘 사급변경 등

○‘23. 7.17.                   1차 기성부분 준공 … 445,830천원

○‘23. 9.27.                    설계변경(2차) 시행 … 증 610,850천원

- 구비 추가경정예산 설계반영 및 타부서 공사의뢰건 수행

○‘23.10.25.                  2차 기성부분 준공 … 532,950천원

3		보고내용

① 2023년도 市 추가 재배정 예산 활용

○ 점자블록 실태조사에 따른 정상예산 재배정 알림 [市도로관리과-5057호('23. 9. 26.)]

- 관내 보도상 점자블록 유지관리를 위한 10,000천원 예산(시비)이 추가 재배정되어 관내 보도 유지관리와 신속한 보행환경 개선을 위해 기 계약건에 설계변경 반영하여 추진

② "독서당로 보행환경 개선사업" 시비 예산 잔액 활용

○ 2023년 보도 유지보수공사(단가계약) 현안사항 검토보고 [토목과-16275호('23. 12. 1.)]

- `'23년 시비 재배정 예산 사업 중 「독서당로 보행환경 개선사업」예산 잔액이 발생함.

- 예산 잔액을 관내 산발적 보도 민원발생 정비비용으로 활용하고자 기 계약건 작업지시하여 정비 추진하고자 함.

▸ 세부사업명: 시도 보도 유지관리(시비 재배정), 사업비: 31,088천 원

③ 작업지시에 따른 신규공정 반영 (기 내부보고 사항)

○ 제4차 작업지시(53번) … 횡단빗물받이 설치

- 용답동 223 '보도블록 전시관' 보도 물고임 해소 및 구배조정을 위한 횡단 빗물받이 설치

○ 제5차 작업지시(1~6번) … 시설물 철거

- 행당동 1-2 외 5개소 보행자의 불편을 초래하는 보도상 노후된 시설물 철거

○ 제5차 작업지시(9번) … 뿌리돌림

- 성수동2가 280-44 보도블록 정비를 위해 보도 기층에 위치한 가로수 뿌리 돌림 조치

○ 제9차 작업지시(6~7번) … 논슬립 설치

- 노후된 행당역 1번 출구 외 1개소 미끄러운 경계석 논슬립 신규 및 재시공

④ 현장 여건에 따른 공사물량 변경 반영

○ 현장 실측 시공에 따른 공사물량 증감(붙임 '설계변경내역서' 참조)

⑤ 공사금액 증·감 현황(상세내역은 붙임 ‘설계변경내역서’ 참조

(단위:원)
구 분	2회 설계변경	최종 설계변경	증·감
총공사비	2,053,313,000	2,093,703,160	증	40,390,160
도급비	1,503,308,700	1,465,200,000	감	38,108,700
관급자재비	400,000,000	497,581,360	증	97,581,360
폐기물처리비	80,000,000	126,920,000	증	46,920,000
이전비	70,004,300	4,001,800	감	66,002,500

4		검토의견

○  시비 추가 재배정 예산 및 예산 잔액 활용

- 구민을 위한 보행환경 개선에 배정 예산을 적극 활용하고자 기 계약건에 반영하여 추진

○  작업지시에 따른 신규공종 반영

- 보행환경 개선에 필요한 신규공종 추가 반영

- 작업지시 현장 조건에 따른 불가피한 신규공종 반영

○  현장 여건에 따른 공사물량 증·감 설계변경 반영

5		향후 조치계획

○ 설계(물량)변경 계약의뢰 … 재무과

- 공사금액 증·감에 따른 도급비 계약금액 및 관급자재비 조정

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.

3. 예산활용 등 설계변경 관련 내부보고 각 1부.  끝.