문서번호	토목과-16781
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

지방시설주사		굴착복구팀장		토목과장		안전건설교통국장
강선덕		代강선덕		성규상		전결 12/12
						신용철
협조
	재무과장		나재진
	계약팀장		황미란

2023년 도로굴착복구공사 외 1건 건설폐기물 운반 및 처리용역 설계변경(2회-최종) 시행 검토보고

『2023년 도로굴착복구공사 외 1건 건설폐기물 운반 및 처리용역』

설계변경(2회-최종) 시행 검토보고

2023. 12.

[토목과]

『2023년 도로굴착복구공사 외 1건 건설폐기물 운반 및 처리용역』

설계변경(2회-최종) 시행 검토보고

본공사(2023년 도로굴착복구공사 및 2023년 불량맨홀정비공사)의 건설폐기물 물량 증·감에 따른 설계변경 검토보고임

1		용역개요

□ 용 역 명: 2023년 도로굴착복구공사 외 1건 건설폐기물 운반 및 처리용역

□ 용역기간: 2023. 3. 3. ~ 2023. 12. 31.

□ 도 급 자: *********************************

□ 용역규모: 건설폐기물 운반 555㎥, 건설폐기물 처리 1,293톤

□ 도 급 비: ************

2		설계변경 개요

□ 설계변경(2회) 사유

○ 본공사(2023년 도로굴착복구공사 외 1건)의 건설폐기물 물량 증·감 반영

□ 주요 물량 증·감 현황

구 분	단위	당 초	변 경	증·감
건설폐기물 운반	㎥	555	1,246	증) 691
건설폐기물 처리	톤	1,293	2,923	증) 1,630

□ 설계변경(2회) 내역

(단위: 원)
구 분		당 초	변 경	증 감	비고
총용역비		**********	**********	**************
도급비	공급가액	**********	**********	**************
	부가가치세	*********	*********	**************
	계	**********	**********	**************

※ 설계변경 계약심사 제외 대상(단순수량 증·감 반영 건설폐기물 처리·운반 용역)

□ 예산과목

- 토목과, 지방도 건설 및 확대포장, 도로관리사업, 관내 불량맨홀정비, 시설비및부대비, 시설비(구비) - ***********

- 토목과, 지방도 건설 및 확대포장, 도로굴착복구기금 운용, 도로복구, 시설비및부대비, 시설비(구기금) - ************

3		조치계획

□ 상기와 같이 공종별 변경된 사항에 대해 변경설계서(2회)에 의거 설계변경하고 용역 추진에 만전을 기하고자 함

붙임  변경설계서(2회) 1부.  끝.