문서번호	토목과-16814
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		보도관리팀장		토목과장		안전건설교통국장
이범찬		김남천		성규상		12/12
						신용철
협조
	재무과장		나재진
	계약팀장		황미란

「2023년 보도정비사업 건설폐기물 운반·처리용역」 설계변경(최종) 검토보고

「2023년 보도정비사업 건설폐기물 운반·처리용역」 설계변경(최종) 검토보고

2023. 12. 12.(화)

토  목  과

「2023년 보도정비사업 건설폐기물 운반·처리용역」

설계변경(최종) 검토보고

「2023년 보도정비사업 건설폐기물 운반·처리용역」의 폐기물 물량 변경 사항에 대한 검토 및 향후 추진계획 보고임

1		추진근거

○ 준공검사보고[고산자로4길 보행환경 개선공사](토목과-9718호, '23. 7. 19.)

○ 설계변경(최종) 검토보고('23년 보도 유지보수공사)(토목과-16780호, '23. 12. 12.)

2		용역개요

○ 용 역 명 : 2023년 보도정비사업 건설폐기물 운반·처리용역

○ 사업기간 :‘23. 4. 20 ~ 12. 31

○ 계약업체

- 대표(분담): 예천환경산업주식회사 대표 황옥순

- 도급(분담): 정일산업(주) 대표 박상만

○ 용 역 비 : 102,775,900원

○ 규    모

- 건설폐기물 운반 1,260㎥ , 건설폐기물 처리 2,898ton

3		추진경과

○ ‘22.04.20.      용역 계약

○ ‘22.04.24.      용역 착수

○ ‘22.12.31.      용역준공(예정)

4		보고내용

① 공사 물량 증가에 따른 폐기물 물량 변경 반영

○ 폐기물 처리 용역에서 처리 중인 공사 계약「2023년 보도 유지보수공사(단가계약)」 외 1건 공사 물량 변경에 따라 폐기물 물량 증·감 발생

② 용역금액 증·감 현황(상세내역은 붙임 ‘설계변경내역서’ 참조)

(단위:원)
구 분		당 초	변 경	증 · 감
총용역비		102,775,900	135,115,300	증	32,339,400
도급비	공급가액	93,432,637	122,832,091	증	29,399,454
	부가세	9,343,263	12,283,209	증	2,939,946
	총액	102,775,900	135,115,300	증	32,339,400

5		향후 조치계획

○ 설계(물량)변경 계약의뢰 … 재무과

- 용역금액 증·감에 따른 도급비 계약금액 조정

붙임  1. 설계변경내역서(최종) 1부.

2. 준공문서 및 설계변경 방침서 각 1부.  끝.