현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
	성 북 구
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제3회) 시행 및 준공기한 연기의뢰[2023년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)]

우리 구에서 시행중인「2023년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)」에 대하여 다음과 같이 설계변경(제3회) 시행 및 준공기한 연기를 의뢰하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2023년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)

2. 공사기간 : 2023.03.29. ~ 2023.12.31.

3. 도 급 자 : 홍용종합건설(주) 대표 박문선

4. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ㆍ 감		비 고
총 공 사 비	2,513,412,100	3,127,000,000	증	613,587,900
도 급 비	1,907,211,000	2,623,750,000	증	716,539,000
관 급 비	287,700,000	255,308,400	감	32,391,600
이 전 비	318,501,100	247,941,600	감	70,559,500

5. 설계변경 사유 : 시공물량 증·감 및 신규공종 발생 등(별첨)

6. 예산과목(증가분)

가. 치수과, 하천 및 하수시설 정비, 하수시설 개량 확충, 하수 시설물 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비: 증)457,392,900원

- 추경예산:300,000,000원 / 낙찰차액 등 집행잔액: 157,392,900원

나. 도시안전과, 재해 및 재난복구 능력강화, 재난관리기금운용, 재해예방 및 응급복구, 시설비 및 부대비, 시설비 : 증)6,195,000원 – 재난관리기금(구비)

다. 재난안전정책과, 재해 및 재난예방, 재난예방 및 복구, 재난관리기금 재난계정, 재난예방(재난관리기금 재난계정), 시설비 및 부대비, 시설비 : 증)150,000,000원-재난관리기금(시비)

7. 준공기한 연기

가. 내역

1) 당  초 : 2023.03.29. ~ 2023.12.31.

2) 변  경 : 2023.03.29. ~ 2024.03.30.

나. 연기사유: 동절기 하수시설물 관련 안전사고 예방 및 긴급복구 등을 위한 공기연장

다. 귀책사유: 성북구청

라. 지체상금: 미부과

붙임  1. 설계변경(제3회) 사유서 1부.

2. 설계변경(제3회) 내역서 1부.

3. 일상감사 의견서 1부.

4. 방침서 1부.

5. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

주무관	박인선		하수담당	김정훈		치수과장	代오강일		건설교통국장	김석우
부구청장	12/12
신상철
협조자	주무관	박재우		계약담당	조은숙		재무과장	김성동
시행	치수과-21134	(	2023. 12. 12.	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168, 치수과(10층) (삼선동5가)	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3632	/전송	02-2241-6563	/	inlinee@sb.go.kr	/	부분공개(5)