문서번호	교통운영과-18613
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		신호시설팀장	교통운영과장
양현지		이용수	12/12
			김상신
협조

2023년 교통신호기 신설 및 보수공사 실시설계용역(강남권역)

계약변경 검토 보고(수정)

2023. 12.

교통운영과

(신호시설팀)

2023년 교통신호기 신설 및 보수공사 실시설계용역(강남권역) 계약변경 검토 보고(수정)

「2023년 교통신호기 신설 및 보수공사 실시설계용역(강남권역)」 시행중 설계 공사비가 변경됨에 따라 설계용역에 대한 계약변경(대가조정)을 검토하고 보고드림

Ⅰ		추진근거

□ 전력기술관리법 운영요령 제15조(대가 등의 조정)

○ 해당 공사의 설계변경으로 공사계약금액의 조정이 10퍼센트 이상 증감된 경우

Ⅱ		용역개요

□ 용 역 명: 2023년 교통신호기 신설 및 보수공사 실시설계용역(강남권역)

□ 용역내용: 교통신호기 교체·신설·이설 등 관련 실시설계

□ 용역기간: 2023. 01. 20.~12. 31.

□ ***********

□ ****************************

□ ******************

□ ********************************************************************************

Ⅲ		계약변경 검토

□ 변경사유

○ 교통신호기 공사 물량 증가로 인한 실시설계비 증가

- 경찰청 교통안전시설물 개선 설치 통보(하달) 증가

- 노후제어기 교체 공사 등 도로사업소 작업지시물량 증가

*************************

□ 적용공사비 변경내역

(단위: 원)

구분	적용 공사비			비고
	당초	변경	증·감
2023년 교통신호기 신설 및 보수공사 실시설계용역 (강남권역)	*************	**************	****************	*****

□ 용역 계약금액 변경

(단위: 원)

구분		변경내역
		당초	변경	(증, 감)
총용역비		***********	***********	*************
용역비	실시설계비	************ ************	************ ************	*************
	손해배상공제료	********** *************	********* *************	*************
	부가가치세	********** **********	********** **********	*************
	계	***********	***********	*************

□ 조치의견

○ 실시설계비 증가에 따른 계약변경(대가조정) 시행

□ 추진일정

○ 재무과로 변경 계약 의뢰: 2023. 12.

○ 변경계약 후 용역 준공  : 2023. 12.

붙임  1. 계약(변경) 내역서 1부.

2. 계약(변경) 합의각서 1부.  끝.