문서번호	교통운영과-18601
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(5,6,7)
방침번호

		시 민
주무관	신호시설팀장	교통운영과장
김민지	이용수	12/12
		김상신

「2023년 교통신호기 원인자공사 감리용역」

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12. 12.(화)

도시교통실

(교통운영과)

「2023년 교통신호기 원인자공사 감리용역」관련

설계변경 검토 보고

「2023년 교통신호기 원인자공사 감리용역」시행 중 감리수행 공사비가 증액됨에 따라 감리용역에 대한 설계변경(대가조정)을  추진코자 보고 드림.

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명: 2023년 교통신호기 원인자공사 감리용역

ㅇ 계약금액: *************************

ㅇ 용역기간: 2023. 01. 01.~2023. 12. 31.

ㅇ 계약업체: ****************

□ 설계변경 검토

ㅇ 용역 계약금액 변경

(단위:원)

용 역 명	구 분	변 경 내 역			비 고
		당 초	변 경	증・감
2023년 교통신호기 원인자공사 감리용역	계	***********	***********	**************	서울시 전역
	용역원가	***********	***********	**************
	손해배상공제료	*********	*********	************
	부가가치세	**********	**********	*************

- 예산과목: 세입세출외현금-공공시설손실부담금

ㅇ 설계변경 사유

- 감리수행 공사비 증액에 따른 감리용역 대가 조정

※ 관련근거 : 전력기술관리법 운영요령 제15조(대가 등의 조정) 2호 해당 공사의

설계변경으로 공사계약금액의 조정이 10퍼센트 이상 증감된 경우

ㅇ 공사금액 변경내역

(단위: 천 원)

용 역 명	감리수행 대상공사비 (부가세 별도)				비고
	당 초	변 경	증・감 액	증・감 율
2023년 교통신호기 원인자공사 감리용역	*********	*********	************	*******

- 공사비 증가 사유

․ (공사비 예측 불가) 재개발․재건축 조합, 기업, 일반사업자 등 원인자공사의 사업주체와 규모 등이 다양하고 공사의 발생을 예측할 수 없으므로 적정 공사비 예측 불가

********************************************************************************************************************************************************************************************

***********************************************************************

ㅇ 감리대상 공사금액 및 감리금액 내역

(단위: 원)

구 분	공사승인	감리대상 공사금액	공정률 적용 감리대상 공사금액	감리금액	비고
*	***	*************	*************	***********	****** ****** ******
**********************	*	**********	**********		***** *****
*********************	*	**********	*		***** *****
*********************	*	***********	**********		***** *****
*********************	**	***********	***********		***** *****
*********************	*	***********	**********		***** *****
*********************	**	***********	***********		***** *****
*****************	**	*************	*************		****** ****** ******

※ 진행중인 사업은 2024년 사업으로 이월

□ 조치의견

ㅇ 상기의 내용과 같이 설계변경을 시행코자 하며, 감리비를 정산하고자 함.

□ 향후일정

ㅇ 2023. 12. 설계변경 시행 및 변경계약 체결

ㅇ 2023. 12. 용역 준공

ㅇ 2023. 12. 세입세출외현금 반환 의뢰하여 감리업체 대금 납입(재무과)

ㅇ 2024.  2. 교통신호기 원인자공사 감리비 납부자에게 남은금액 환불 조치

붙임  설계변경 요청 공문 등 각 1부.  끝.