아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(2023년 도봉,노원 시설물 - 2차 최종)

우리 사업소에서 시행중인 『2023년 도봉,노원구관내 상수도시설물설치 및 보수공사(장기계속)』건에 대해 아래와 같이 변경(2차-최종) 계약을 의뢰합니다.

1. 공 사 명 : 2023년 도봉,노원구관내 상수도시설물설치 및 보수공사(장기계속)

2. 계약업체 : 대한도시산업개발(주) (대표 신현이)

3. 공사기간

2023. 3. 15. ~ 2023. 12. 31.(총부기기간 : 2023. 3. 9. ~ 2024. 6. 30.)

4. 변경내역

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증감액(원)	비 고
총부기금액	838,373,200	919,070,000	증) 80,696,800
1차수 금액	696,259,000	919,070,000	증) 222,811,000	2023년분
2차수 금액	142,114,200	-	감)142,114,200	2024년분

5. 설계변경 사유 : 신규공종 및 계약물량 증감사항 발생

6. 예산과목 :

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후밸브정비)-21103

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지비(배수지,가압장 시설물유지관리)-22202

- 소방용수시설등의설치및관리,소방용수시설설치및보수,시설비-401-01

붙임  설계변경 관련 서류 각 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	박상권		급수관리팀장	代박상권		급수운영과장	12/12
代이문성
협조자
시행	급수운영과-19519	(	2023. 12. 12.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3343	/전송	02-3146-3389	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개(6)