아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	변경 계약의뢰(동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사 외 1개소 계측관리 용역외 1건)

1. 시설건설과-12021(2023. 12. 11)호 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행 중인 「동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사 외 1개소 계측관리 용역외 1건」에 대하여 아래와 같이 변경 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

용 역 명	동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사 외 1개소 계측관리 용역	동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사 외 1개소 강관 비파괴 검사 용역
용역금액	169,950,290원	85,800,270원
용역개요	계측기 설치(108개) 및 현장 계측·분석	용접접합부(190개소) 자기비파괴검사(1,378m)
용역기간	'22. 10. 6 ~ '23. 12. 30	'22. 10. 14 ~ '23. 12. 30
계약상대자	***************	**************

나. 계약변경 내역

구분		동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사 외 1개소 계측관리 용역	동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사 외 1개소 강관 비파괴 검사 용역
용역금액	당초	169,950,290원	85,800,270원
	변경	변경없음	변경없음
용역기간	당초	'22. 10. 6 ~ '23. 12. 30	'22. 10. 14 ~ '23. 12. 30
	변경	'22 .10. 6 ~ '24. 5. 27 (149일 연기)	'22. 10. 14 ~ '24. 5. 27 (149일 연기)
연기사유		대상공사 준공기한 연기에 따른 용역기간 연장	대상공사 준공기한 연기에 따른 용역기간 연장
귀책소재		계약상대자 귀책없음	계약상대자 귀책없음
지체상금 부과여부		미부과	미부과

다. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비, 시설비(장기사용송배수관 정비)

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 설계변경 합의서 등 준공기한 연기 요청 공문 각 1부.  끝.

	시 설 건 설 과 장
주무관	박종혁		시설건설과장	12/12
이승우
협조자
시행	시설건설과-12045	(	2023. 12. 12.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1), 4층 시설건설과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1491	/전송	02-3146-1529	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	부분공개(7)