문서번호	치수과-4586
결재일자	2023. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		김창신	12/13
			이유국
협 조

- 2023년 한강 저수로 준설공사 -

설계변경(총차1회, 1차1회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

미래한강본부

(시설부)

- 2023년 한강 저수로 준설공사 -

설계변경(총차1회, 1차1회) 검토보고

「2023년 한강 저수로 준설공사」관련 건설사업관리자 설계변경(총차1회, 1차1회) 요청에 따른 조치 계획을 검토하여 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 한강 저수로 준설공사(장기계속)

ㅇ 위    치 : 한강 잠실수중보 ~ 신곡수중보

ㅇ 공사기간 : '23. 8. 21. ~ '24. 5. 31.

ㅇ 공사규모 : 준설 27,240㎥, 반출 47,670톤

- 지천합류부 : 홍제천, 반포천, 만초천

- 수상시설 : 한강갑문, 여의하류(서울마리나),반포철탑, 잠실택시승강장

************************************

ㅇ 시 공 사 : 유호산업개발(주) 대표 유정환

ㅇ 감 리 사 : ㈜이준엔지니어링 외 1개사 대표 김정대

□ 관련문서

ㅇ 2023년 한강 저수로 준설공사(총차1회, 1차1회) 변경 설계서 제출

(이준한강2023-34호, 2023.12.04.)

ㅇ 실정보고서

- 한강갑문 준설계획(치수과-1553호, 2023.8.23)

- 지천 합수부 추가 준설(치수과-2612호, 2023.9.26)

- 주운수로 저수심 구간 준설(치수과-3445호, 2023.12.01)

□ 변경사유

ㅇ 한강 유람선 운항 노선 여유수심 부족에 따른 준설계획 변경

- 한강갑문 주변 추가 준설

- 마포, 원효, 한강철교 구간 추가 준설

ㅇ 국고보조금 추가 배정에 따른 지천 합수부 추가 준설

- 반포천, 여의샛강 하류, 홍제천 합수부 추가 준설

□ 주요 공종 수량 변경 현황

공 종	규 격	단위	변 경 현 황
			당 초	변 경	증·감
한강갑문	백호준설, L=1.0km	㎥	2,800	14,000	증)	11,200
홍제천 하구	백호준설, L=9.85km	㎥	300	5,700	증)	5,400
반포천 하구	백호준설, L=19.3km	㎥	2,800	5,670	증)	2,870
반포철탑	백호준설, L=21.6km	㎥	3,700	-	감)	3,700
잠실택시승강장	백호준설, L=29.6km	㎥	3,100	1,455	감)	1,645
마포대교	백호준설, L=14.4km	㎥	-	1,270	증)	1,270
원효~한강철교	백호준설, L=16.5km	㎥	-	4,070	증)	4,070
여의샛강 하류	백호준설, L=12.5km	㎥	-	9,800	증)	9,800
사토운반	L=49.9km, D/T 24톤	톤	48,720	73,290	증)	16,349

ㅇ 공사비 증·감 현황

- 총차 1회                                                          (단위 : 원)

***	**	***	***	****
****	*	*************	*************	**	***********
*****	*	***********	***********	**	**********
*****	*	*************	*************	**	*************

- 1차 1회                                                          (단위 : 원)

***	**	***	***	****
****	*	***********	*************	**	***********
*****	*	**********	***********	**	**********
*****	*	*************	*************	**	*************

□ 조치계획

ㅇ 설계변경 관련 규정에 대하여 검토한 결과 적정하게 변경하였다고 판단되어, 상기와 같이 설계변경(총차1회, 1차1회)을 시행코자 함

- 설계변경 시행 및 변경계약 요청(치수과→총무과)

ㅇ 설계변경 승인 통보(치수과→건설사업관리단)

붙임 : 1. 변경 내역서 1부

2. 계약금액조정 검증확인서 각 1부

3. 설계변경자문 의견서 각 1부

4. 설계변경 검토 의견서 1부

5. 관련 보고서 1부.  끝.