아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(2023년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사)-3차

우리과에서 시행중인『2023년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)』건에 대하여 아래와 같이 변경계약(3차)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 2023년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

나. 계약업체: **************

다. 계약기간: 2023. 6. 20.~ 2023. 12. 31.(총 부기기간: 2023. 6. 20.~ 2024. 6. 30.)

라. 변경내역

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증·감(원)	비 고
총부기금액	*************	*************	*	2023.06.20.~2024.06.30.
1차수 금액	*************	*************	*************	2023.06.20.~2023.12.31.
2차수 금액	*************	*************	*************	2024.01.01.~2024.06.30.

마. 설계변경 사유: 계약물량 증·감 사항 발생 및 차수별 계약금액 변경

바. 예산과목: 상수도사업비,영업비,배급수비,수선유지비,상수도관누수복구(31202)

붙임  설계변경 관련 서류 각 1부.  끝

	시 설 관 리 과 장
주무관	최호림		시설운영팀장	조규환		시설관리과장	12/12
이규현
협조자
시행	시설관리과-20292	(	2023. 12. 12.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 북부수도사업소 (번동)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3392	/전송	02-3146-3439	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	부분공개(7)