문서번호	기반시설과-4620
결재일자	2023. 12. 13.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이균휴		이석근	12/13
			이유국
협조

[올림픽대교북단외 1개소 승강기 설치공사 ]

설 계 변 경(1회)   검 토 보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12. 13. (수)

미래한강본부 시설부

(기반시설과)

[올림픽대교북단외 1개소 승강기 설치공사 ]

설 계 변 경(1회)   검 토 보 고

시설부장:이유국☎3780-0830 기반시설과장 : 이석근☎0675 담당 : 이균휴☎0665

우리 본부에서 추진중인 [올림픽대교북단외 1개소 승강기 설치공사]관련 공사현장 여건 및 실정보고를 반영하여 설계변경하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

ㅇ 공사명: 올림픽대교북단외 1개소 승강기 설치공사

ㅇ 위  치: 성동구 성수동2가158-4 및 광진구 구의동562

ㅇ 기  간: 2023. 3.28.~2023.12.31.

ㅇ 도급비: 금1,568,607천원

ㅇ 업체명: 정상개발 주식회사

ㅇ 공사내용: 올림픽대교북단 및 영동대교북단 승강기 및 계단 설치

Ⅱ		설계변경내역

ㅇ 공사 현장 실정보고

- 공사 현장 여건에 따른 물량증감 실정보고 반영(기반시설과-4081,4153호)

- 우천으로 작업중단에 따른 작업일수 부족으로 기한연장 반영

ㅇ 공사 기간 :

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	2023. 3.28. ~ 2023.12.31.	2023. 3.28. ~ 2024. 3.20	증80일

- 사유: 우천으로 작업중단에 따른 작업일수 부족으로 준공기한 연장

ㅇ 도급비 변경내역

구 분		변 경 전	변 경 후	증·감
도급비계		1,568,607,900	1,628,979,000	증)60,371,100
도급비	공급가액	1,426,007,182	1,480,890,000	54,882,818
	부가세	142,600,718	148,089,000	5,488,282
공급가액		1,426,007,182	1,480,890,000	증)54,882,818
직접비	소계	666,964,909	739,150,729	증)72,185,820
	올림픽북단	339,182,734	411,368,554
	영동대교북단	327,782,175	327,782,175
기타	재경비	759,042,273	741,739,271	감)17,303,002

-설계변경 세부내역

번호	건 명	변경내용 및 사유	공사비 증·감(천원)
1	목재데크면적 변경 (올림픽북단)	-토공사 및 강관파일 공사장비가 진입시 자전거도로 및 보행로 저촉으로 안전성 확보를 위해 안전휀스내에서 작업코자 기존 테크 철거 면적 확장 불가피 -작업공간 협소로 데크구간 이외는 장비출입이 불가하여 철거된 데크 재설치 하는것이 타당한것으로 판단됨. -데크철거면적 증가:기존(210㎡)→변경(550㎡)	증79,404	적정
2	안전관리비감액(올림픽북단) (영동북단)	-현장휀스 구간을 확장하여 인접한 보행로 및 자전거 도로를 이용하는 시민의 안전과 작업의 효율성 제고필요 -작업공간 확보 및 시민의 안전을 위해 현장과 보행로의 동선구분은 타당한것으로 판단됨. ※ 휀스설치구간 증가 : 올림픽대교북단(100m→200m) 영동대교북단(75m→200m) -보행안전도우미 실투입 정산 : 375인→200인	감2,783	적정
3	품질시험비감액(올림픽북단)(영동대교북단)	-설계와 중복산정된 품질 시험 제외(토공및기초공사) -관급자재 관련 시험성적서 제외(강관,아스콘,철근등)	감23,707	적정
4	재경비정산	-설계변경내역에 따른 제경비 정산	증 7,457	적정
계			증60,371

Ⅲ		예 산 조 치

ㅇ올림픽대교북단외 1개소 승강기 설치공사의 도급비 증액분(60,371천원)은

예산잔액을 활용하여 설계변경 조치코자함.

- 예산과목 : 한강접근체계개선(일반회계),한강공원승강기신설 및 개선,

시설비(401-01)

Ⅲ		조 치 계 획

ㅇ위 사항을 설계에 반영하여 증액조치하고 설계변경하여 공사추진에       만전을 기하고자 함.

붙임 1.설계변경내역서(1회) 1부.

2.실정보고서(총괄)(대용량첨부). 끝.