문서번호	친환경건물과-15517
결재일자	2023. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		공공건물효율화팀장	친환경건물과장
김응균		남성준	12/13
			代이홍석
협조
	주무관		장천섭

북부기술교육원 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링 건축공사

설계변경 검토 및 낙찰차액 사용 보고

2023. 12.

기후환경본부

(친환경건물과)

북부기술교육원 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링 건축공사

설계변경 검토 및 낙찰차액 사용 보고

우리부서에서 시행중인「북부기술교육원 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링 건축공사」와 관련하여 계약상대자 및 감리자로부터 제출된 설계변경 요청에 대한 검토 보고 및 낙찰차액 사용 보고임

□ 관련근거

○「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제9장 [행정안전부 예규 제252호]

- 제6절 공사 설계변경, 용역 과업내용 변경 및 물품수량조절 등

○ 계약상대자 실정보고(원전 23-03호, 2023.12.13.)

○ 감리자 실정보고 검토의견(RE23-북부-02호, 2023.12.13.)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 북부기술교육원 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링 건축공사

○ 공사개요: 북부기술교육원 제로에너지건물(ZEB) 전환 건축공사 1식

- 가설, 내진, 미장, 수장, 금속, 창호, 유리공사 및 부대공사 1식

○ 시 공 사: ********************

○ 계약금액: ************************************

○ 공사기간: **************************

○ 공    정: ******************************

□ 설계변경 주요 내용

○ 설계변경 사유

- 장애인·노인 임산부 등 관련법률의 현장기준 충족에 따른 물량 증가 발생

- 내, 외부 단열재 설계내역 누락 물량 반영에 따른 물량 증가 발생

- 운영부서 요청에 따른 창호 부분 실내브라인드 설치 물량 증가 발생

- 운영부서 요청에 따른 지하층 기계·전기실 바닥 도장 물량 증가 발생

- 옥외 지열 공사현장 매립 폐기물 발생에 따른 처리비용 증가 발생

- 기타 가설, 미장, 수장 및 철거공사 등 현장여건에 따른 물량 변경 발생

○ 설계변경에 따른 물량 증·감 내역

구 분	규 격	단위	물량변동			비고
			당초	변경	증 · 감
********	***	*	*	**	****
*********	*****	**	*	**	****
**************	******	**	*	*	***
*******************	*****	*	***	***	*****
**************	*****	*	***	***	*****
*****	*********	**	*	*	***
**************	***	*	****	****	******
***************	***********	*	**	**	****
****	**	*	*	*	***
***************	********	**	*	**	***
****	**********	**	*	**	****
********	**********	*	*	*	***
**************	*****	*	*	**	****
**************	******	*	*	***	*****
***********	*************	*	*	****	******
***********	********	*	*	*****	*******

○ 설계변경 금액                                           (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감
도급액	공급가액	*************	*************	**	***********
	부가가치세	***********	***********	*	**********
	계	*************	*************	*	***********
관급비		***********	***********	*	*
총공사비		*************	*************	*	***********

□ 예산현황

○ 예산(총사업비)집행 내역                                 (단위: 원)

구분	사용내역				비고
	예산	계약	집행잔액	낙찰차액
총사업비	*************	************	**********	***********
시설비	*************	*************	*	***********
감리비	***********	**********	**********	*********

○ 예산사용 계획                                           (단위: 원)

집행잔액	낙찰차액	미집행액	합계	비고
*	***********	*	***********

- 예산과목: 기후환경본부 친환경건물과, 저탄소 도시환경 조성, 건물온실가스 감축방안 마련, 북부기술교육원 제로에너지 전환, 시설비및부대비, 시설비

□ 검토 및 조치의견

○ 계약상대자가 제출한 실정보고에 대한 감리 검토의견이 관련규정에 적합하므로 설계변경 처리코자 하며,

○ 소요예산은 시설비 낙찰차액을 활용하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

□ 향후계획

○ 2023. 12.: 변경계약 체결

○ 2024.  2.: 정산 및 준공

붙임 1. 계약상대자 실정보고서 1부

2. 감리 검토의견 및 설계변경 내역서 1부

3. 계약검증 확인서 1부. 끝.