문서번호	시설관리과-20333
결재일자	2023. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이영훈		김영민	12/13
			이규현
협조

「2023년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속계약)」

설계변경 심의위원회 개최

2023. 12

북부수도사업소

[시설관리과]

「2023년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속계약)」

설계변경 심의위원회 개최

『2023년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속계약)』 시행 중 물량 증·감 및 신규공종 발생으로 설계변경 심의위원회를 개최계획을 보고드림.

Ⅰ	사업개요

▢ 사 업 명: 2023년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속계약)

▢ 계약기간: □23. 4. 11. ~□24. 3. 31.

▢ 계 약 자: ******************

▢ 계약금액: *****************************

Ⅱ	심의회 개최

▢ 심의일정: 2023. 12.13.(수) 14:00

▢ 심의장소: 북부수도사업소 시설관리과

▢ 심의위원

*******************

****************************************

Ⅲ	심의내용

▢ 작업물량 증·감 및 신규공종에 따른 설게변경 사항으로 사업의 특성상 발생되는 수량 변동 및 단가 적용의 적정성 여부

▢ 단가 낙찰률 적용범위 내 적용 여부 등

Ⅳ	설계변경 사항

▢ 설계변경 내역

구 분	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증감액
총부기금액	***********	***********	*
1차수 금액	**********	**********	************
2차수 금액	**********	**********	************

▢ 주요 설계변경 내역

공종	단위	기존	변경	증·감
원심펌프 수리(유량 101~200㎥/h이하)	식	1	0	감1
원심펌프 수리(유량 601~700㎥/h이하)	식	1	0	감1
인라인 등 소형펌프 수리(3.7kw이하)	식	1	0	감1
인라인 등 소형펌프 수리(11kw이하)	식	1	0	감1
인라인 등 소형펌프 수리(15kw이하)	식	0	1	증1
소프트실제수밸브교체(400mm)	식	0	1	증1
압력검출기고정대철거설치	식	0	2	증2
압력계(오일충만식)철거설치	개	0	1	증1
만수감지기세트 철거·설치	조	0	1	증1
에어배출장치교체	개	0	3	증3

Ⅴ	조치의견

▢ 작업물량 증·감 및 신규공종에 따른 적정성 여부를 검토 및 심의하여 설계변경에 반영하고자 함.

붙임: 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 심의 신청서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부. 끝.