문서번호	급수운영과-22799
결재일자	2023. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		서부수도사업소장
박상현	代신정우	代신정우		12/13
				김정윤
협 조
	급수관리팀장		신정우

- 2024년 서대문구, 마포구 관내 상수도공사 -

재해예방 기술지도 용역 추진계획

2023. 12.

서부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?		■

- 2024년 서대문구, 마포구 관내 상수도공사 -

재해예방 기술지도 용역 추진계획

우리 사업소에서 시행하는 상수도공사 현장의 안전관리 및 산업재해 예방을 위한 건설공사 재해예방 기술지도 용역 추진계획 보고임

Ⅰ		추진근거

ㅇ 산업안전보건법 제73조 (건설공사의 산업재해 예방지도)

ㅇ 산업안전보건법 시행령 제59조 (지도기술계약 체결 대상 건설공사 및 체결시기)

	주 요 내 용
‣ 기술지도 대상 - (공사금액) 1억원 이상, 120억원 미만(토목공사는 150억원 미만) - (공사종류) 건설공사, 전기, 정보통신 및 소방시설공사 ‣ 계약체결 주체 - 건설사업자에게 건설공사를 완성하도록 약정하고 그에 따른 대가를 지급하는 건설공사 발주자 ‣ 계약시기 - 공사착공 전일까지 계약체결

Ⅱ		용역개요

ㅇ 용 역 명: 2024년 서대문구, 마포구 관내 상수도공사 재해예방 기술지도 용역

ㅇ 용역기간: 착수일로부터 ’24. 12. 31. 까지

ㅇ 용역금액: 54,568천원

ㅇ 과업내용: 서대문구, 마포구 관내에서 시행하는 상수도공사 재해예방 기술지도 등

ㅇ 계약방법: 전자공개 수의계약(2인 이상 견적)

ㅇ 용역대상 (14건)

연번	구분	공사명	기술지도 대상 공사기간
1	장기계속 단가계약	2023 서대문구 관내 상수도공사	’24. 1. ~ ’24. 6.
2		2024 서대문구 관내 상수도공사	’24. 6. ~ ’24.12.
3		2023 마포구 관내 상수도공사	’24. 1. ~ ’24. 6.
4		2024 마포구 관내 상수도공사	’24. 6. ~ ’24.12.
5		2023 서대문구 관내 상수도시설물 정비공사	’24. 1. ~ ’24. 6.
6		2024 서대문구 관내 상수도시설물 정비공사	’24. 6. ~ ’24.12.
7		2023 마포구 관내 상수도시설물 정비공사	’24. 1. ~ ’24. 6.
8		2023 마포구 관내 상수도시설물 정비공사	’24. 6. ~ ’24.12.
9		2023 서부관내 포장도로굴착복구공사	’24. 1. ~ ’24. 6.
10		2024 서부관내 포장도로굴착복구공사	’24. 6. ~ ’24.12.
11		와우산배수지(1지) 내부방식공사	’24. 8. ~ ’24.12
12	단위공사	대현동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사	’24. 3. ~ ’24. 12.
13		동교동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사	’24. 3. ~ ’24. 12.
14		와우산배수지 유효공급시간 개선공사	’24. 8. ~ ’24. 12.

ㅇ 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비【장기사용 배급수관 정비(350㎜ 이하)】

Ⅲ		향후계획

ㅇ ’23. 12.: 기술용역 타당성 심사(기술심사담당관)

ㅇ ’24. 1.: 용역 계약의뢰 및 계약

ㅇ ’24. 1. ~ 12.: 용역 착수 및 준공

붙임  1) 산출내역서 1부.

2) 과업내용서 1부.  끝.