문서번호	치수과-4632
결재일자	2023. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		김창신	12/14
			代김창신
협 조

- 2023년 한강 취수장 주변 준설공사 -

실정보고에 대한 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

미래한강본부

(시설부)

- 2023년 한강 취수장 주변 준설공사 -

실정보고에 대한 검토 보고

「2023년 한강 취수장 주변 준설공사」관련 건설사업관리자 실정보고 사항(사토장 변경)에 대하여 검토하여 처리계획을 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 한강 취수장 주변 준설공사

ㅇ 위    치 : 한강 잠실수중보 상류(취수장 주변)

ㅇ 공사기간 : '23. 8. 21. ~ '23. 12. 31.

ㅇ 공사규모 : 준설 및 반출 23,480㎥

- 자양 1,300㎥, 일산 500㎥, 풍납 15,580㎥, 성남 5,900㎥, 강북 200㎥

********************

ㅇ 시 공 사 : 유호산업개발(주) 대표 유정환

ㅇ 감 리 사 : ㈜이준엔지니어링 외 1개사 대표 김정대

□ 추진경위

ㅇ '23.  8. 21. : 공사착수

ㅇ '23. 10. 17. : 준설토 반입요청(시설관리과→치수과)

ㅇ '23. 10. 17. : 준설토 반출 업무지시(시설관리과→치수과)

- 준설토 반출지 : 안양천교 자전거도로 구조개선 현장

ㅇ '23. 12.  1. : 대체 사토장 부지 현장조사

ㅇ '23. 12. 12. : 실정보고서 제출(시공사→건설사업관리단)

ㅇ '23. 12. 14. : 실정보고 검토의견서 제출(건설사업관리단→치수과)

□ 보고내용

ㅇ 준설토 사용이 가능한 본부 공사 현장으로 준설토 반출

- 안양천교 현장 : 11,756㎥ 반출 완료(물막이용 재료)

- 암사초록길  : 10,000㎥ 반출 예정(조경용 토양)

ㅇ 공공건설 공사장으로 준설토 반출이 곤란한 잔여 수량(17,234㎥)은 사토장 변경하여 반출 조치

- 양평군 화전리 일원(L=55.47km)으로 준설토 반출을 계획하였으나 매립 공사 완료로 준설토 반출이 곤란함에 따라 개인사토장으로 반출

‣ 사토장 변경(안)

***	********	*****		***		***
		**	**
**		******	******	*
********	*****	******	*	**	******
************	*****	*	******	**	******	*****
***************	*****	*	******	**	******	*****
**************	****		******	**	******	*****

ㅇ 공사비 증·감 현황                                         (단위 : 원)

****	*****	*****	**********		***
*******	*************	***********	**	***********
*********	***********	**********	**	**********
*********	*************	***********	**	***********

□ 조치계획

ㅇ 예산 절감을 위해 본부 공사건설 현장으로 준설토 21,756㎥ 반출

- 예산절감액 : 950,384천원

ㅇ 준설토 사용 수요가 없는 잔여 수량 17,234㎥ 사토장 변경하여 반출 작업지시

□ 행정사항

ㅇ 작업지시 통보(치수과→건설사업관리단)

ㅇ 물량 증‧감 사항을 반영하여 추후 설계변경 시행

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.