문서번호	정수시설과-3731
결재일자	2023. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이용성		함태광	12/14
			성호준
협 조
	주무관			한미경
	주무관			김동석

’23~24년 입상활성탄 교체공사 공사기간 연장 검토보고

2023.12.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

’23~24년 입상활성탄 교체공사

공사기간 연장 검토보고

우리센터 ’23~24년 입상활성탄 교체 1차수 공사에 대하여 다음과 같은 사유로 공사기간 연장하여 품질확보 등 본공사 추진에 만전을 기하고자 함.

□ 관    련

❍ 입상활성탄 교체공사 추진계획 보고〔정수시설과-3200(2023.10.16.)〕

❍ 입상활성탄 교체공사 사고이월 보고〔정수시설과-3706(2023.12.12.)〕

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : ’23~24년 구의아리수정수센터 입상활성탄 교체공사(장기계속)

❍ 공사기간 : ’23.11.10.~ ’24.04.30.

❍ 공사계약 내역

(단위 : 원)

구분	총액	계약금액		비고
		1차수(990㎥)	2차수(990㎥)
계약금액 및 공사기간	***********	*********** ************** *****************	*********** ************** *****************

❍ 계 약 자 : 하송이엔씨(주) 대표 장소미

□ 추진사항

❍ 공사 착공계 접수 및 기술지도계약 완료

❍ 계약체결 후 본공사 추진을 위한 사전 준비 등

❍ 사고이월 방침

□ 공사기간 연장 사유 및 검토

❍ 당초 ’23년 11월중 입상활성탄(3개지분 990㎥)을 납품받아 교체공사 추진코자 하였으나, 교체를 위한 입상활성탄이 2023.12.11. 납품확정(합격)되어 ’23.12.31.까지 1차수 공사 완료하기 위한 절대공기 부족으로

❍ 1차수 공사기간을 ’24.04.30.까지 연장하여 품질확보 등 원활한 교체공사 추진에 만전을 기하고자 함.

❍ 1차수공사 공기연장

구 분	당 초	변 경	비 고
기 간	’23.11.10.~ ’23.12.31.	’23.11.10.~ ’24.04.30.	120일 연장

❍ 공기연장에 따른 지체상금 부과여부 : 미부과

※ 자재 납품지연에 따른 발주처(우리센터) 귀책사유

□ 향후 추진일정

❍  ’23.12. : 공사기간 연장(재계약)

❍  ’24.01.~04. : 교체공사 완료 및 준공

붙임 : 1. 입상활성탄 교체공사 사고이월 보고 1부.

2. 23~24년 입상활성탄 교체공사 계약체결 통보서 1부.

3. 23~24년 입상활성탄 교체공사 계약서 1부  끝.