문서번호	치수과-4595
결재일자	2023. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		김창신	12/14
			代김창신
협 조

- 2023년 한강 취수장 주변 준설공사 -

실정보고에 대한 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

미래한강본부

(시설부)

- 2023년 한강 취수장 주변 준설공사 -

실정보고에 대한 검토 보고

「2023년 한강 취수장 주변 준설공사」관련 건설사업관리자 실정보고 사항(성남취수장 주변 추가 준설)에 대하여 검토하여 처리계획을 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 한강 취수장 주변 준설공사

ㅇ 위    치 : 한강 잠실수중보 상류(취수장 주변)

ㅇ 공사기간 : '23. 8. 21. ~ '23. 12. 31.

ㅇ 공사규모 : 준설 및 반출 23,480㎥

- 자양 1,300㎥, 일산 500㎥, 풍납 15,580㎥, 성남 5,900㎥, 강북 200㎥

********************

ㅇ 시 공 사 : 유호산업개발(주) 대표 유정환

ㅇ 감 리 사 : ㈜이준엔지니어링 외 1개사 대표 김정대

□ 추진경위

ㅇ '23.  8. 17. : 공사계약

ㅇ '23.  8. 21. : 공사착수

ㅇ '23.  9.7 ~ 9.11 : 사전 수심측량

ㅇ '23. 12.  7. : 실정보고서 제출(시공사→건설사업관리단)

ㅇ '23. 12. 11. : 실정보고 검토의견서 제출(건설사업관리단→치수과)

□ 보고내용

ㅇ 성남취수장 안정적인 상수원 확보와 수질 개선을 위해 추가 준설 필요

- 수심측량 구간 준설토 퇴적으로 유효 취수수심(DL -5.06m) 부족

- 취수수심 부족으로 깨끗하고 안정적인 상수원 확보가 곤란한 실정임

* 수심측량 결과 : 수심 4.2m ~ 5.4m (취수장 흡입구 관저고 4.0m)

구 분	준설계획고	준설면적(㎡)		준설량(㎥)		증·감
		당초	변경	당초	변경
성남취수장	-5.06m	20,000	44,400	5,900	14,200	증)	8,300

※ 준설계획수심은 한강 수로조사용역 측점별 계획하상고(200cms) 적용

ㅇ 공사비 증·감 현황                                         (단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증․ 감		비 고
******	**********	***********	**	**********
********	***********	***********	**	***********
******	*********	**********	**	*********
******	**********	***********	**	**********
*******	***********	***********	**	***********
*********	**********	**********	**	**********
*********	***********	***********	**	***********

□ 조치계획

ㅇ 안정적인 상수원 확보 및 수질개선을 위해 실정보고 사항을 반영하여 예산범위 내에서 우선 작업지시

- 성남취수장 준설량 : (당초) 5,900㎥ → (변경) 14,200㎥

ㅇ 추가 준설에 따른 부족 예산은 준설토 반출 절감예산 및 공사 낙찰차액 활용

□ 행정사항

ㅇ 작업지시 통보(치수과→건설사업관리단)

ㅇ 물량 증‧감 사항을 반영하여 추후 설계변경 시행

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.