문서번호	급수운영과-19668
결재일자	2023. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
박상권	최용진	12/14
		송병욱
협 조

중간집하장 및 사토장 변경 보고

(2023년-2차 도봉노원구관내 상수도시설물)

2023. 12.

북부수도사업소

(급수운영과)

중간집하장 및 사토장 변경 보고

「2023년-2차 도봉,노원구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(단가계약)」와 관련 중간집하장 및 사토장 변경 요청에 대하여 현장 실사 및 검토 후 결과를 보고드림.

※관련근거 : 이준 2023-51(2023.12.14.)호 중간집하장 및 사토장 선정에 따른 실정보고

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 2023년-2차 도봉,노원구 관내 상수도시설물 설치 및보수공사(단가계약)

□ 공사기간 : *************************

□ 도 급 비 : ************

□ 도 급 사 : *****************

Ⅱ		현 황

○ 중간집하장이 3km이내만 내역서에 표기되어 있으며, 도심지내 사용  가능한 토지가 없는 실정임

○ 발생토(잔토)가 당초 사토장연장(23.7km)만 표기되어 있어 연장내 사토장을 없어, 원활한 잔토처리를 위하여 반입이 가능한 사토장으로 변경요청이 들어온 실정임.

Ⅲ		검토의견

○ 원활한 잔토처리를 위해 중간집하장 및 사토장 위치를 아래와 같이  승인코자 함.

○ 중간집하장 위치

- 중간집하장 위치 : 의정부시 장암동 254-5

- 운반거리 : 3㎞ → 5.04㎞(증 2.04㎞)

○ 사토장 위치

- 사토장 위치 : ********************

- 운반거리 : *************************

○ 개략공사비 :*******************************

○ 현황사진

중간집하장 현장사진	사토장 현장사진

Ⅳ		조치계획

○ 상기와 같이 검토결과를 *********************에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고 추후 설계변경시 반영토록 조치하고자 합니다.

붙임  사토장 실정보고 1부.  끝.